ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2010 г. N 50

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРИОД
2010 - 2015 ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.03.2011 N 135,
от 01.10.2011 N 810)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года".
2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период включать указанную в пункте 1 настоящего Постановления Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 февраля 2010 г. N 50

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРИОД
2010 - 2015 ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.03.2011 N 135,
от 01.10.2011 N 810)

ПАСПОРТ
федеральной целевой программы
"Ядерные энерготехнологии нового поколения на период
2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года"

Наименование Программы   - федеральная целевая программа
                           "Ядерные энерготехнологии нового поколения
                           на период 2010 - 2015 годов
                           и на перспективу до 2020 года"

Дата принятия решения    - распоряжение Правительства Российской
о разработке Программы     Федерации от 23 июля 2009 г. N 1026-р
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 135)

Государственные          - Государственная корпорация по атомной
заказчики Программы        энергии "Росатом", федеральное государственное
                           бюджетное учреждение "Национальный
                           исследовательский центр "Курчатовский
                           институт"
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)

Государственный          - Государственная корпорация по атомной энергии
заказчик - координатор     "Росатом"
Программы
(позиция введена Постановлением Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)

Основной разработчик     - Государственная корпорация по атомной
Программы                  энергии "Росатом"

Цель и задачи Программы  - основная цель Программы - разработка ядерных
                           энерготехнологий нового поколения на базе
                           реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым
                           ядерным топливным циклом для атомных
                           электростанций, обеспечивающих потребности
                           страны в энергоресурсах и повышение
                           эффективности использования природного урана
                           и отработавшего ядерного топлива.
                           Задачи Программы:
                           разработка реакторов на быстрых нейтронах с
                           замкнутым ядерным топливным циклом;
                           исследование новых способов использования
                           энергии атомного ядра

Важнейшие целевые        - удельный вес инновационной продукции и
индикаторы и показатели    услуг, созданных путем реализации
                           мероприятий Программы, в общем объеме продаж
                           продукции и услуг отрасли - 10 процентов
                           (2020 год);
                           рост эффективности использования природного
                           урана в ядерном топливном цикле (по
                           сравнению с базовым (2009) годом) на 31,8
                           процента к 2020 году;
                           снижение объемов хранящегося отработавшего
                           ядерного топлива и радиоактивных отходов,
                           приходящихся на единицу электрической
                           мощности атомных электростанций (по
                           сравнению с базовым (2009) годом), на 31,1
                           процента к 2020 году;
                           количество разработанных ядерных технологий,
                           соответствующих мировому уровню или
                           превосходящих его (нарастающим итогом), - 24
                           технологии (за весь период реализации
                           Программы, начиная с 2010 года);
                           количество патентных заявок на изобретения,
                           зарегистрированных технических решений (в
                           год на 100 исследователей и разработчиков) -
                           12 единиц (2020 год);
                           количество публикаций в рецензируемых
                           мировых изданиях в области использования
                           атомной энергии (в год на 100 исследователей
                           и разработчиков) - 15 публикаций (2020 год)

Сроки и этапы реализации - 2010 - 2020 годы.
Программы                  Программа осуществляется в два этапа:
                           первый этап - 2010 - 2014 годы;
                           второй этап - 2015 - 2020 годы

Объем и источники        - общий объем финансирования Программы (в
финансирования             ценах соответствующих лет) составляет 131464,9
Программы                  млн. рублей, в том числе:
                           за счет средств федерального бюджета -
                           110428 млн. рублей, из них:
                           на научно-исследовательские и опытно-
                           конструкторские работы - 51772 млн.
                           рублей;
                           на капитальные вложения - 58656 млн.
                           рублей;
                           за счет средств внебюджетных источников -
                           21036,9 млн. рублей
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.03.2011 N 135,  от  01.10.2011
N 810)

Ожидаемые конечные       - на первом этапе реализации Программы будут
результаты реализации      достигнуты следующие результаты:
Программы и показатели     получение принципиально новых технических
социально-экономической    решений и разработка новых технических
эффективности              проектов энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах
                           со свинцовым, свинцово-висмутовым
                           и с натриевым теплоносителями;
                           завершение проектирования и осуществление
                           пуска топливных комплексов по производству
                           уранплутониевого оксидного топлива для
                           реакторов на быстрых нейтронах;
                           разработка рабочего проекта строительства
                           многоцелевого исследовательского реактора на
                           быстрых нейтронах МБИР;
                           разработка детектора нейтринной диагностики
                           активной зоны реактора;
                           создание установки для получения дисперсных
                           композиционных конструкционных материалов
                           для реакторов.
                           На втором этапе реализации Программы будут
                           достигнуты следующие результаты:
                           построение опытно-демонстрационного
                           энергоблока с реактором на быстрых нейтронах
                           со свинцовым теплоносителем и
                           опытно-промышленного энергоблока с реактором
                           на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым
                           теплоносителем многоцелевого
                           исследовательского реактора на
                           быстрых нейтронах МБИР (взамен действующих
                           исследовательских реакторов, отработавших
                           ресурс);
                           введение в эксплуатацию технически
                           переоснащенного комплекса больших физических
                           стендов;
                           построение и введение в эксплуатацию
                           промышленного комплекса по производству
                           плотного топлива для реакторов на быстрых
                           нейтронах;
                           создание полифункционального
                           радиохимического исследовательского
                           комплекса для отработки перспективных
                           технологий замкнутого топливного цикла;
                           завершение разработки и обоснования
                           технологических и проектно-конструкторских
                           решений, касающихся промышленного пристанционного
                           модуля переработки отработавшего ядерного топлива
                           реакторов на быстрых нейтронах, а также
                           специализированной нитки централизованного завода
                           переработки отработавшего ядерного топлива
                           реакторов на быстрых и тепловых нейтронах;
                           завершение строительства, реконструкции,
                           технического перевооружения и введение в
                           эксплуатацию необходимой исследовательской базы
                           для обеспечения безопасности (ядерной,
                           радиационной, пожарной безопасности ядерных
                           реакторов, установок по производству и
                           переработке ядерного топлива);
                           модернизация установок для проведения
                           исследований в области управляемого
                           термоядерного синтеза;
                           завершение строительства термоядерного
                           комплекса "Байкал" для исследований
                           инерционного термоядерного синтеза, верификации
                           кодов в условиях отсутствия полигонных
                           испытаний;
                           разработка макета ядерно-оптического
                           преобразователя энергии, опытных образцов
                           фотовольтаического плазменно-пылевого источника
                           электрической энергии, установок интроскопии
                           объектов и высокоскоростной системы сбора
                           данных с детекторов.
                           Доля продукции отрасли в общем объеме
                           произведенной промышленной продукции за счет
                           реализации мероприятий Программы составит 1,34
                           процента (2020 год). Коэффициент бюджетной
                           эффективности Программы составит 0,81.
                           Важным экологическим эффектом реализации
                           Программы станет более высокий уровень ядерной
                           и радиационной безопасности за счет сокращения
                           объемов отработавшего ядерного топлива и
                           радиоактивных отходов, достижения приемлемых
                           для общества и экономики экологических
                           характеристик замкнутого ядерного топливного
                           цикла, а также минимизации использования в нем
                           вовлекаемого природного урана
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.03.2011 N 135, от 01.10.2011 N 810)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Постановка проблемы, анализ причин ее возникновения,
обоснование ее связи с национальными приоритетами
социально-экономического развития

Ключевым условием устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения является стабильное и гарантированное обеспечение экономики страны энергоресурсами.
Перспективы, стратегические и тактические задачи развития атомной энергетики определены:
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2009 года;
Программой развития атомной отрасли Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 июня 2006 г. (N 4483);
Программой деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2008 г. N 705.
Основными проблемами современной атомной энергетики Российской Федерации являются:
высокое и постоянно нарастающее количество отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов;
неэффективное использование запасов природного урана;
возможное снижение научного потенциала атомной энергетики Российской Федерации;
снижение конкурентоспособности продукции атомной энергетики на мировом рынке.
В настоящее время организациями Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" реализуются мероприятия по созданию условий, необходимых для поддержания и роста атомного энергетического комплекса, создания надежной системы обеспечения ядерной и радиационной безопасности, решения отложенных экологических проблем, возникших на первых этапах развития атомной отрасли страны, в том числе ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:
по выводу из эксплуатации 2 энергоблоков Билибинской и Белоярской атомных электростанций;
по разработке и строительству атомной станции малой мощности с реакторной установкой типа КЛТ-40С;
по развитию, реконструкции и расширению разделительных и сублиматных производств;
по развитию технологий обращения с отработавшим ядерным топливом;
по разработке базового проекта атомной электростанции на базе ядерного реактора на тепловых нейтронах типа ВВЭР (АЭС-2006);
по внедрению инновационных проектов в области атомной энергетики Российской Федерации, включая разработку высокотемпературных технологий и обоснование модульной гелиевой реакторной установки с газовой турбиной.
Однако комплексного и своевременного решения проблем современной атомной энергетики Российской Федерации указанные мероприятия не обеспечивают.
Для решения существующих проблем необходима концентрация усилий на создании ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа) призвана обеспечить ускоренное развитие и воспроизводство научно-технологического потенциала атомной энергетики Российской Федерации, привлечение молодых специалистов, создание условий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня в области использования атомной энергии и способствовать достижению национальных стратегических целей.

Обоснование необходимости решения проблем
программно-целевым методом, анализ различных вариантов
этого решения с учетом рисков их реализации

Учитывая сложность проблем и необходимость их комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное технологическое перевооружение объектов атомной энергетики Российской Федерации, представляется наиболее эффективным решать их в рамках Программы с использованием программно-целевого метода. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и получить мультипликативный эффект, выраженный в развитии исследовательской, конструкторской, внедренческой и производственной деятельности.
Консолидация ресурсов позволит более полно сформулировать и реализовать приоритеты развития страны и отрасли, повысить степень координации и качество управления Программой, что особенно важно в случае осуществления долгосрочных инвестиций в наукоемкие и высокотехнологичные сферы экономики.
Без реализации мер программно-целевого регулирования решение существующих проблем представляется недостаточным, поскольку в этом случае будет увеличиваться зависимость атомной энергетики Российской Федерации от экспорта сырьевых ресурсов и импорта высокотехнологичной продукции. Без интенсификации работ по поиску новых источников энергии, развития перспективных технологий использования энергии атомного ядра будет потеряно преимущество в сфере научно-технического развития атомной отрасли, снизится престиж и конкурентоспособность новых российских ядерных энергетических и оборонных технологий на мировом рынке.
В конечном итоге это может привести к отставанию российской науки и технологий от уровня научных достижений ведущих стран в области использования атомной энергии, к потере научного, кадрового потенциала и, как следствие, к снижению в среднесрочной и долгосрочной перспективе конкурентоспособности в указанной сфере деятельности.
Программно-целевой метод в качестве основы государственного управления в области обеспечения сбалансированных и последовательных решений является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволит существенно повысить эффективность решения стоящих перед отраслью проблем.
В качестве возможных подходов к решению проблем рассматривались пассивный и активный варианты.
При пассивном варианте решения проблем осуществляется объединение всего комплекса исследований и разработок в Программу с сохранением структуры и объемов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предусмотренных действующими федеральными целевыми программами, а также мероприятиями по решению общеотраслевых проблем, не входящими в состав федеральных целевых программ.
Анализ такого варианта решения проблем показывает, что предусматриваемый уровень финансирования не обеспечивает:
выполнение необходимого комплекса работ для перехода атомной энергетики Российской Федерации к 2025 году на ядерные энерготехнологии нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом;
системный подход к решению поставленных задач для получения оптимального результата в указанный срок.
Активный вариант решения проблем характеризуется ускоренным развитием научно-технологического потенциала атомной энергетики Российской Федерации, что требует увеличения объемов выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансируемых в том числе за счет бюджетных средств.
В рамках активного варианта решения проблем предусматривается активизация и расширение проведения:
комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом;
комплекса научных исследований, направленных на изучение новых способов использования энергии атомного ядра.
Предусматривается создание новой и обновление существующей исследовательской базы, необходимой для выполнения комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по Программе.
Реализация активного варианта решения проблем позволит обеспечить своевременную разработку ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом, ускоренное развитие и воспроизводство научно-технологического потенциала атомной энергетики Российской Федерации, массовое привлечение молодых специалистов, а также создание условий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня в области использования атомной энергии.
В рамках активного варианта решения проблем рассматриваются два сценария реализации Программы, аналогичные по составу задач, но различающиеся по интенсивности мероприятий, динамике ресурсного обеспечения и ожидаемым результатам.
Первый сценарий характеризуется выбором реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем в качестве базовой технологии и концентрацией всех имеющихся ресурсов на выбранном направлении. В случае успешной реализации будет создан реактор, в наибольшей степени удовлетворяющий всем требованиям к технологиям реакторов на быстрых нейтронах.
Предусматривается создание необходимой дополнительной исследовательской базы, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения разработки реактора на быстрых нейтронах, создание производственно-технологических комплексов для его топливообеспечения и замыкания ядерного топливного цикла. При этом предполагается равномерное обеспечение финансовыми ресурсами в течение всего периода реализации Программы.
Ожидается, что общий размер средств, направляемых на реализацию Программы в соответствии с указанным сценарием, составит 109704 млн. рублей, в том числе размер средств федерального бюджета - 101302 млн. рублей, размер средств внебюджетных источников - 8402 млн. рублей.
Удельный вес инновационной продукции и услуг, созданных путем реализации мероприятий Программы по первому сценарию, в общем объеме продаж продукции и услуг отрасли составит 10 процентов.
Первый сценарий не предполагает разработку альтернативных реакторных технологий, что является основным риском, связанным с выбором единственной базовой технологии реактора на быстрых нейтронах, на которую будет ориентирована атомная энергетика Российской Федерации.
Второй сценарий предусматривает проведение дополнительного комплекса мероприятий, снижающих риски первого сценария. Предполагается дополнительно к разработке реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем проводить разработку реакторов на быстрых нейтронах с натриевым и свинцово-висмутовым теплоносителями. Проведение указанных работ позволит не позднее 2014 года получить принципиально новые технические решения и разработать технические проекты таких реакторов и технологий замкнутого ядерного топливного цикла. К 2020 году станет возможным начать работы по сооружению головных промышленных энергоблоков атомных электростанций в рамках реализации генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики. Второй сценарий ориентирован на привлечение большего объема внебюджетных средств.
Предполагаемый общий размер средств, направляемых на реализацию Программы в соответствии с этим сценарием, составит 131464,9 млн. рублей, в том числе размер средств федерального бюджета - 110428 млн. рублей, размер средств внебюджетных источников - 21036,9 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 135)
Удельный вес инновационной продукции и услуг, созданных путем реализации мероприятий Программы по второму сценарию, в общем объеме продаж продукции и услуг отрасли составит 10 процентов.
Второй сценарий предполагает большую гибкость управления и эффективность вложения средств федерального бюджета, обеспечивает в 2,5 раза увеличение размера средств внебюджетных источников по сравнению с первым сценарием.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 135)
Анализ вариантов решения проблем показывает, что наиболее эффективной будет реализация второго сценария. С учетом этого все дальнейшие расчеты сделаны исходя из реализации Программы по второму сценарию.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Цель Программы - разработка ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом для атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива.
Достижение поставленной цели требует концентрации всех ресурсов на решении таких задач, как:
разработка реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом. При решении этой задачи будет создана научно-технологическая база инновационной атомной энергетики Российской Федерации;
исследование новых способов использования энергии атомного ядра. Решение этой задачи повлечет за собой техническое перевооружение экспериментально-стендовой базы для проведения исследований и разработок, в том числе в области управляемого термоядерного синтеза, а также получение новых научных знаний.
Ввиду длительности сроков реализации и первоочередной необходимости получения принципиальных технических решений по технологиям реакторов на быстрых нейтронах выполнение Программы осуществляется в 2 этапа.
На первом этапе (2010 - 2014 годы) будут достигнуты следующие результаты:
получение принципиально новых технических решений и разработка новых технических проектов энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах со свинцовым, свинцово-висмутовым и с натриевым теплоносителями;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
завершение проектирования и осуществление пуска топливных комплексов для производства уранплутониевого оксидного топлива для реакторов на быстрых нейтронах;
завершение первых реакторных испытаний и послереакторных исследований плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах;
начало испытаний технологий и оборудования по обращению с радиоактивными отходами, образующимися в процессе производства и переработки облученного плотного топлива, включая этапы окончательного захоронения радиоактивных отходов и обезвреживания минорных актинидов;
разработка рабочего проекта строительства многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР;
разработка детектора нейтринной диагностики активной зоны реактора;
создание установки для получения дисперсных композиционных конструкционных материалов для реакторов.
На втором этапе (2015 - 2020 годы) будут достигнуты следующие результаты:
построение опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем и опытно-промышленного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем, а также многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР (взамен действующих исследовательских реакторов, отработавших ресурс);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
введение в эксплуатацию технически переоснащенного комплекса больших физических стендов для моделирования реакторов на быстрых нейтронах и их топливных циклов;
построение и введение в эксплуатацию промышленного комплекса по производству плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах;
создание полифункционального радиохимического исследовательского комплекса для отработки перспективных технологий замкнутого топливного цикла;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
завершение разработки и обоснования технологических и проектно-конструкторских решений, касающихся промышленного пристанционного модуля переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах, а также специализированной нитки централизованного завода переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых и тепловых нейтронах;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
завершение строительства, реконструкции, технического перевооружения и введение в эксплуатацию необходимой исследовательской базы для обеспечения безопасности;
модернизация установок для проведения исследований в области управляемого термоядерного синтеза;
завершение строительства термоядерного комплекса "Байкал" для исследований инерционного термоядерного синтеза, верификации кодов в условиях отсутствия полигонных испытаний;
разработка макета ядерно-оптического преобразователя энергии, опытных образцов фотовольтаического плазменно-пылевого источника электрической энергии, установок интроскопии объектов и высокоскоростной системы сбора данных с детекторов.
Целевыми индикаторами достижения цели Программы, отражающими конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:
удельный вес инновационной продукции и услуг, созданных путем реализации мероприятий Программы, в общем объеме продаж продукции и услуг отрасли;
рост эффективности использования природного урана в ядерном топливном цикле;
снижение объемов хранящегося отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, приходящихся на единицу электрической мощности атомных электростанций.
Для оценки хода решения задач Программы определены следующие показатели:
количество разработанных ядерных технологий, соответствующих мировому уровню или превосходящих его (нарастающим итогом);
количество патентных заявок на изобретения, зарегистрированных технических решений (в год на 100 исследователей и разработчиков);
количество публикаций в рецензируемых мировых изданиях в области использования атомной энергии (в год на 100 исследователей и разработчиков).
Целевые индикаторы и показатели Программы по годам ее реализации представлены в приложении N 1.
Корректировка целевых индикаторов и показателей, а также их значений может быть проведена в установленном порядке при изменении бюджетного финансирования Программы.
В ходе реализации Программы Правительством Российской Федерации по предложению Министерства экономического развития Российской Федерации может быть принято решение о досрочном прекращении ее реализации в следующих случаях:
при принятии Правительством Российской Федерации решения о сокращении объемов финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий Программы по сравнению с предусмотренными объемами и отсутствии возможности обеспечения государственным заказчиком Программы дополнительного финансирования ее мероприятий за счет средств внебюджетных источников;
в случае выявления при проведении независимой экспертизы несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям, предусмотренным Программой;
в случае непредставления государственным заказчиком Программы в надлежащей форме и в надлежащие сроки отчетности о результатах реализации Программы за истекший год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Структурообразующими функциональными элементами Программы являются исследовательские проекты, нацеленные на получение конкретных результатов и объединяющие комплекс взаимоувязанных мероприятий.
Проекты формируются и финансируются по статьям расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на капитальные вложения.
В рамках решения задачи по разработке реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом намечается финансирование реализации мероприятий по следующим направлениям:
направление "Разработка перспективных технологий реакторов на быстрых нейтронах", включая:
разработку и сооружение опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
разработку и сооружение опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
разработку энергоблока нового поколения с реактором на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
разработку интегрированных систем кодов нового поколения для анализа и обоснования безопасности перспективных атомных электростанций и ядерного топливного цикла;
направление "Создание новых экспериментальных стендов и специального оборудования, модернизация и развитие экспериментально-стендовой базы для обоснования физических принципов, проектно-конструкторских решений, анализа и обоснования безопасности реализации основных научно-технологических решений инновационной атомной энергетики", включая:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
создание многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
техническое перевооружение опытного реактора на быстрых нейтронах тепловой мощностью 60 МВт;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
техническое перевооружение комплекса больших физических стендов для моделирования реакторов на быстрых нейтронах и их топливных циклов;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
направление "Разработка технологий производства перспективных видов топлива и материалов для реакторов на быстрых нейтронах", включая:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
разработку технологий производства уранплутониевого оксидного топлива для реакторов на быстрых нейтронах;
разработку технологий производства плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах;
разработку перспективных конструкционных материалов для реакторов на быстрых и тепловых нейтронах;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
направление "Разработка технологий замкнутого топливного цикла для реакторов на быстрых и тепловых нейтронах", включая:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
создание полифункционального радиохимического исследовательского комплекса;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
расчетно-экспериментальное обоснование условий окончательного удаления радиоактивных отходов и разработку перспективных обеспечивающих технологий;
разработку и обоснование технологических и проектно-конструкторских решений, касающихся промышленного пристанционного модуля переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах, а также специализированной нитки централизованного завода переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых и тепловых нейтронах;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 01.10.2011 N 810.
Капитальные вложения предусматривается направить на:
строительство на базе Белоярской атомной электростанции опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
строительство опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в Мелекесском районе Ульяновской области (г. Димитровград);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 01.10.2011 N 810;
строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР;
техническое перевооружение опытного реактора на быстрых нейтронах тепловой мощностью 60 МВт;
техническое перевооружение комплекса больших физических стендов для моделирования реакторов на быстрых нейтронах и их топливных циклов;
строительство промышленного производства МОКС-топлива для энергоблока N 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП "ГХК", г. Железногорск, Красноярский край;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
абзацы двадцать шестой - двадцать седьмой исключены. - Постановление Правительства РФ от 01.10.2011 N 810;
техническое перевооружение топливного комплекса для производства тепловыделяющих сборок;
техническое перевооружение производства по выпуску элементов активной зоны и комплектующих тепловыделяющих элементов и сборок уранплутониевого оксидного топлива;
строительство комплекса по производству плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах;
строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
реконструкция и техническое перевооружение лабораторного комплекса для отработки и экспериментального обоснования инновационных пирохимических технологий для замкнутого топливного цикла.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
Для решения задачи исследования новых способов использования энергии атомного ядра намечается реализация следующих научно-исследовательских проектов и работ:
исследование свойств веществ в экстремальных состояниях (высокие температуры, давление, облучение) с целью формирования баз данных для обоснования разработки технических решений, касающихся инновационных реакторных установок;
разработка технологий прямого преобразования ядерной энергии в электрическую энергию и лазерное излучение;
разработка нового поколения детекторов ионизирующего излучения;
разработка перспективных технологий для упрочнения поверхности материалов на основе лазерных, пучковых и плазменных источников излучения;
исследования и разработки в области управляемого термоядерного синтеза.
Капитальные вложения предусматривается направить на:
строительство термоядерного комплекса "Байкал";
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение экспериментально-стендовой базы термоядерных исследований и разработок;
реконструкция ускорительного комплекса в г. Протвино, Московская область;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
реконструкция и техническое перевооружение комплекса электростатических ускорителей.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 2.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года в ценах соответствующих лет составляет 131464,9 млн. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 135)
за счет средств федерального бюджета - 110428 млн. рублей, из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 51772 млн. рублей, на капитальные вложения - 58656 млн. рублей;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
за счет средств внебюджетных источников - 21036,9 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 135)
Объемы ресурсного обеспечения мероприятий Программы определены исходя из необходимости реализации различных категорий проектов Программы, в том числе параметров этих проектов (стоимость проекта, планируемое число проектов, срок реализации), методами экспертных оценок и сравнительной оценки затрат и трудозатрат на аналогичные проекты, сметными нормами и расценками по объектам капитального строительства.
Финансовое обеспечение Программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников приведены в приложении N 3, объемы финансирования реализации задач Программы приведены в приложении N 4.
Общий объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет 53768,2 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 51772 млн. рублей. Мероприятия Программы, реализуемые в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и объемы их финансирования приведены в приложении N 5.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
Средства федерального бюджета будут привлекаться для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до стадии разработки конструкторской документации и создания опытных образцов.
Общий объем финансирования капитальных вложений составит 77696,7 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 58656 млн. рублей. Мероприятия Программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов экспериментально-стендовой, исследовательской базы и объемы их финансирования приведены в приложении N 6.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.03.2011 N 135, от 01.10.2011 N 810)
Капитальные вложения будут направляться на строительство опытно-демонстрационных образцов, новых экспериментальных стендов и специального оборудования, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение действующей экспериментально-стендовой базы для обоснования физических принципов, проектно-конструкторских решений, анализа и обоснования безопасности реализации основных научно-технологических решений.
Замещение внебюджетных средств средствами федерального бюджета не допускается. Недофинансирование работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, не влечет за собой дополнительных обязательств федерального бюджета и федеральных органов исполнительной власти.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Государственными заказчиками Программы являются Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
Государственным заказчиком - координатором Программы является Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которая осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
Руководителем Программы является генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль и организация комплексных проверок за ходом реализации Программы возлагаются непосредственно на государственного заказчика. Промежуточные отчеты и годовые доклады о ходе реализации Программы являются открытыми.
Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий Программы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Отбор исполнителей (поставщиков, подрядчиков) программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Планируемый рост производства и продаж инновационной продукции атомной энергетики Российской Федерации, включая экспорт высокотехнологичного оборудования, работ и услуг в сфере использования атомной энергии, должен обеспечить увеличение к 2020 году вклада отрасли в объем произведенной промышленной продукции страны до 1,34 процента.
Кроме того, планируется, что реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
повышение темпа роста экспорта высокотехнологичного оборудования, работ, услуг в области использования атомной энергии более чем в 1,5 раза (к 2020 году около 8 процентов);
привлечение молодых исследователей и разработчиков в атомную отрасль (ориентировочное снижение среднего возраста исследователей и разработчиков с 46 до 42 лет);
рост количества публикаций в рецензируемых мировых изданиях в области использования атомной энергии (к 2020 году 15 публикаций в год на 100 исследователей и разработчиков);
рост количества патентных заявок на изобретения, зарегистрированных технических решений (к 2020 году 12 единиц в год на 100 исследователей и разработчиков), что характеризует повышение инновационной активности научных и инженерных кадров атомной отрасли, их заинтересованность в создании рыночно востребованной высокотехнологичной продукции и степень вовлечения научных результатов в гражданско-правовой оборот.
Важным экологическим эффектом реализации Программы должен стать более высокий уровень ядерной и радиационной безопасности за счет сокращения объемов отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, достижения приемлемых для общества и экономики экологических характеристик замкнутого ядерного топливного цикла, а также минимизации использования в нем вовлекаемого природного урана.
Коэффициент бюджетной эффективности Программы, рассчитанный на основе прямых налоговых поступлений, составит 0,81.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации Программы, методика оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Программы и расчет экономической эффективности Программы представлены в приложениях N 7, 8 и 9 соответственно.

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2015 - 2020 ГОДОВ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 N 135)

─────────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────
  Целевые индикаторы, показатели │ Единица  │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020
                                 │измерения │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год
─────────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────
                                                    Целевые индикаторы

 Удельный вес инновационной       процентов   0,4    0,6    0,8    1,1    1,5    2,5    3,1    4,2    5,6    7,6     10
 продукции и услуг, созданных
 путем реализации мероприятий
 Программы, в общем объеме продаж
 продукции и услуг отрасли

 Рост эффективности использования    -"-       -      -      -      -      4      5     10,7   15,9   20,6   25,5   31,8
 природного урана в ядерном
 топливном цикле

 Снижение объемов хранящегося     процентов    -     0,8    4,4     8     10,9   13,2   15,3   19,3   22,7   27,3   31,1
 отработавшего ядерного топлива и
 радиоактивных отходов,
 приходящихся на единицу
 электрической мощности атомных
 электростанций

                                                        Показатели

 Количество разработанных ядерных   единиц     2      3      7      10     12     12     16     17     19     21     24
 технологий, соответствующих
 мировому уровню или
 превосходящих его (нарастающим
 итогом)

 Количество патентных заявок на      -"-      6,4    6,7    7,3    7,8    8,5     9     9,5     10    10,5   11,5    12
 изобретения, зарегистрированных
 технических решений
 (в год на 100 исследователей и
 разработчиков)

 Количество публикаций в            единиц    5,9    6,6    7,8    8,5     9      10     11     12     13     14     15
 рецензируемых мировых изданиях в
 области использования атомной
 энергии (в год на 100
 исследователей и разработчиков)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРИОД
2010 - 2015 ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Направления   │  2010 -  │                                           В том числе
    расходов,    │2020 годы ├────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬────────
    источники    │ - всего  │2010 год│2011 год │2012 год│2013 год│2014 год │2015 год│2016 год│2017 год │ 2018  │ 2019  │  2020
  финансирования │          │        │         │        │        │         │        │        │         │  год  │  год  │  год
─────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴────────
                       I. Разработка реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом

 Всего            110251,79  4527,88   6620,2   12646,6  15748,79  16214,1  13488,2  15986,4   12607,4  6382,5  5280,4   749,32

   в том числе:
   федеральный     89530,6   3169,98   5749,5   10177,4  13243,5   12744,5  11503,3  11053,8   9606,4   6252,5  5280,4   749,32
   бюджет

   иные            20721,19   1357,9    870,7    2469,2  2505,29   3469,6    1984,9   4932,6    3001      130      -       -
   источники

 НИОКР - всего     45502,9   2080,08   3115,8    8939,3  10287,9   6308,8    4937,3   3951,6   2935,6    1144   1112,7   689,82

   в том числе:
   федеральный     43506,7   1167,48    2577     8601,9  10220,9   6247,2    4858,5   3951,6   2935,6    1144   1112,7   689,82
   бюджет

   иные             1996,2    912,6     538,8    337,4      67      61,6      78,8      -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные       64748,89   2447,8   3504,4    3707,3  5460,89   9905,3    8550,9  12034,8   9671,8   5238,5  4167,7    59,5
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный     46023,9    2002,5   3172,5    1575,5   3022,6   6497,3    6644,8   7102,2   6670,8   5108,5  4167,7    59,5
   бюджет

   иные            18724,99   445,3     331,9    2131,8  2438,29    3408     1906,1   4932,6    3001      130      -       -
   источники

                             1. Разработка перспективных технологий реакторов на быстрых нейтронах

 Всего             48239,6   1709,18   1971,8    5440,3   6194,7    4671     4950,5   7747,6   5925,7   5313,5  4259,3   56,02

   в том числе:
   федеральный     38759,4    601,18   1338,5     4844    5749,9   3541,7    3195,6    5065    4924,7   5183,5  4259,3   56,02
   бюджет

   иные             9480,2     1108     633,3    596,3    444,8    1129,3    1754,9   2682,6    1001      130      -       -
   источники

 НИОКР - всего     20909,9   1103,98   1877,3    4951,4   5566,9   2507,9    1826,8    1225     834,7    500,6   459,3   56,02

   в том числе:
   федеральный     19145,5    423,18   1338,5     4614    5499,9   2446,3     1748     1225     834,7    500,6   459,3   56,02
   бюджет

   иные             1764,4    680,8     538,8    337,4      67      61,6      78,8      -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные       27329,7    605,2     94,5     488,9    627,8    2163,1    3123,7   6522,6    5091    4812,9   3800      -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный     19613,9     178        -       230      250     1095,4    1447,6    3840     4090    4682,9   3800      -
   бюджет

   иные             7715,8    427,2     94,5     258,9    377,8    1067,7    1676,1   2682,6    1001      130      -       -
   источники

                         1.1. Разработка и сооружение опытно-демонстрационного энергоблока с реактором
                                       на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем

 Всего             25698,5     184       490      2041    2422,3   1197,5     1150    4358,4   4510,1    5110   4215,2     20

   в том числе:
   федеральный     25698,5     184       490      2041    2422,3   1197,5     1150    4358,4   4510,1    5110   4215,2     20
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      8015,6     184       490      1811    2172,3    957,5     600     518,4     420,1    427,1   415,2     20

   в том числе:
   федеральный      8015,6     184       490      1811    2172,3    957,5     600     518,4     420,1    427,1   415,2     20
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные       17682,9      -         -       230      250       240      550      3840     4090    4682,9   3800      -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный     17682,9      -         -       230      250       240      550      3840     4090    4682,9   3800      -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

          1.2. Разработка и сооружение опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах
                                             со свинцово-висмутовым теплоносителем

 Всего             13228,2     1286     973,3    1197,3   1320,8   1984,7    2652,5   2682,6    1001      130      -       -

   в том числе:
   федеральный       3748      178       340      601      876      855,4    897,6      -         -        -       -       -
   бюджет

   иные             9480,2     1108     633,3    596,3    444,8    1129,3    1754,9   2682,6    1001      130      -       -
   источники

 НИОКР - всего      3581,4    680,8     878,8    938,4     943      61,6      78,8      -         -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный       1817       -        340      601      876        -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные             1764,4    680,8     538,8    337,4      67      61,6      78,8      -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные        9646,8    605,2     94,5     258,9    377,8    1923,1    2573,7   2682,6    1001      130      -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный       1931      178        -        -        -       855,4    897,6      -         -        -       -       -
   бюджет

   иные             7715,8    427,2     94,5     258,9    377,8    1067,7    1676,1   2682,6    1001      130      -       -
   источники

           1.3. Разработка энергоблока нового поколения с реактором на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем

 Всего               5366      184       380     1542,5   1544,1    710,7    710,7     294        -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный       5366      184       380     1542,5   1544,1    710,7    710,7     294        -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего       5366      184       380     1542,5   1544,1    710,7    710,7     294        -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный       5366      184       380     1542,5   1544,1    710,7    710,7     294        -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

       1.4. Разработка интегрированных систем кодов нового поколения для анализа и обоснования безопасности перспективных
                                       атомных электростанций и ядерного топливного цикла

 Всего              3946,9    55,18     128,5    659,5    907,5     778,1    437,3    412,6     414,6    73,5    44,1    36,02

   в том числе:
   федеральный      3946,9    55,18     128,5    659,5    907,5     778,1    437,3    412,6     414,6    73,5    44,1    36,02
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      3946,9    55,18     128,5    659,5    907,5     778,1    437,3    412,6     414,6    73,5    44,1    36,02

   в том числе:
   федеральный      3946,9    55,18     128,5    659,5    907,5     778,1    437,3    412,6     414,6    73,5    44,1    36,02
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

               2. Создание новых экспериментальных стендов и специального оборудования, модернизация и развитие
       экспериментально-стендовой базы для обоснования физических принципов, проектно-конструкторских решений, анализа
        и обоснования безопасности реализации основных научно-технологических решений инновационной атомной энергетики

 Всего             19096,6    350,5     633,4    1555,9    2768     4373     3481,5   2801,2   2220,3    445,6   387,7    79,5

   в том числе:
   федеральный     17468,3    118,7      396     1238,5   2456,3    4073     3251,5   2801,2   2220,3    445,6   387,7    79,5
   бюджет

   иные             1628,3    231,8     237,4    317,4    311,7      300      230       -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      5205,1    350,5      366     1193,5   1467,9   1092,9    554,8     89,5      30       20      20       20

   в том числе:
   федеральный      4973,3    118,7      366     1193,5   1467,9   1092,9    554,8     89,5      30       20      20       20
   бюджет

   иные             231,8     231,8       -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные       13891,5      -       267,4    362,4    1300,1   3280,1    2926,7   2711,7   2190,3    425,6   367,7    59,5
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный      12495       -        30        45     988,4    2980,1    2696,7   2711,7   2190,3    425,6   367,7    59,5
   бюджет

   иные             1396,5      -       237,4    317,4    311,7      300      230       -         -        -       -       -
   источники

                       2.1. Создание многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР

 Всего             16432,2    350,5     503,4    1120,9   2246,3    3779      2962    2646,2   2136,9    374,6   312,4     -

   в том числе:
   федеральный     14803,9    118,7      266     803,5    1934,6    3479      2732    2646,2   2136,9    374,6   312,4     -
   бюджет

   иные             1628,3    231,8     237,4    317,4    311,7      300      230       -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      3645,7    350,5      266     803,5    1117,9    782,9    298,9      26        -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный      3413,9    118,7      266     803,5    1117,9    782,9    298,9      26        -        -       -       -
   бюджет

   иные             231,8     231,8       -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные       12786,5      -       237,4    317,4    1128,4   2996,1    2663,1   2620,2   2136,9    374,6   312,4     -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный      11390       -         -        -      816,7    2696,1    2433,1   2620,2   2136,9    374,6   312,4     -
   бюджет

   иные             1396,5      -       237,4    317,4    311,7      300      230       -         -        -       -       -
   источники

               2.2. Техническое перевооружение опытного реактора на быстрых нейтронах тепловой мощностью 60 МВт

 Всего              1040,9      -        100      100     111,7      154     159,5    106,5     83,4      71     75,3     79,5

   в том числе:
   федеральный      1040,9      -        100      100     111,7      154     159,5    106,5     83,4      71     75,3     79,5
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      485,9       -        100      100       60       50       45,9      40       30       20      20       20

   в том числе:
   федеральный      485,9       -        100      100       60       50       45,9      40       30       20      20       20
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные         555        -         -        -       51,7      104     113,6     66,5     53,4      51     55,3     59,5
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный       555        -         -        -       51,7      104     113,6     66,5     53,4      51     55,3     59,5
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

               2.3. Техническое перевооружение комплекса больших физических стендов для моделирования реакторов
                                          на быстрых нейтронах и их топливных циклов

 Всего              1623,5      -        30       335      410       440      360      48,5       -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный      1623,5      -        30       335      410       440      360      48,5       -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      1073,5      -         -       290      290       260      210      23,5       -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный      1073,5      -         -       290      290       260      210      23,5       -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные         550        -        30        45      120       180      150       25        -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный       550        -        30        45      120       180      150       25        -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

       3. Разработка технологий производства перспективных видов топлива и материалов для реакторов на быстрых нейтронах

 Всего             32797,79   2350,1   3570,5    4230,2  4852,69   5629,8    3720,9   4187,9   3432,5    274,4   274,4   274,4

   в том числе:
   федеральный     23185,1     2332    3570,5    2674,7   3103,9   3589,5    3720,9   1937,9   1432,5    274,4   274,4   274,4
   бюджет

   иные            9612,69     18,1       -      1555,5  1748,79   2040,3      -       2250     2000       -       -       -
   источники

 НИОКР - всего     12417,1     552      470,5    1586,7   1940,2   1853,2    1820,9   1937,9   1432,5    274,4   274,4   274,4

   в том числе:
   федеральный     12417,1     552      470,5    1586,7   1940,2   1853,2    1820,9   1937,9   1432,5    274,4   274,4   274,4
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные       20380,69   1798,1    3100     2643,5  2912,49   3776,6     1900     2250     2000       -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный      10768      1780     3100      1088    1163,7   1736,3     1900      -         -        -       -       -
   бюджет

   иные            9612,69     18,1       -      1555,5  1748,79   2040,3      -       2250     2000       -       -       -
   источники

      3.1. Разработка технологий и создание производства смешанного оксидного топлива для реакторов на быстрых нейтронах

 Всего             11699,79   2258,1   3240,5    2392,5  1768,39   2040,3      -        -         -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный      6337,1     2240    3240,5     837      19,6       -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные            5362,69     18,1       -      1555,5  1748,79   2040,3      -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      669,1      460      140,5      49      19,6       -        -        -         -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный      669,1      460      140,5      49      19,6       -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные       11030,69   1798,1    3100     2343,5  1748,79   2040,3      -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный       5668      1780     3100      788       -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные            5362,69     18,1       -      1555,5  1748,79   2040,3      -        -         -        -       -       -
   источники

                  3.2. Разработка технологий производства плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах

 Всего              18164       46       165      1578    2697,7   3253,3     3415     3882     3127       -       -       -

   в том числе:
   федеральный      13914       46       165      1578    2697,7   3253,3     3415     1632     1127       -       -       -
   бюджет

   иные              4250       -         -        -        -         -        -       2250     2000       -       -       -
   источники

 НИОКР - всего       8814       46       165      1278     1534     1517      1515     1632     1127       -       -       -

   в том числе:
   федеральный       8814       46       165      1278     1534     1517      1515     1632     1127       -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные         9350       -         -       300     1163,7   1736,3     1900     2250     2000       -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный       5100       -         -       300     1163,7   1736,3     1900      -         -        -       -       -
   бюджет

   иные              4250       -         -        -        -         -        -       2250     2000       -       -       -
   источники

            3.3. Разработка перспективных конструкционных материалов для реакторов на быстрых и тепловых нейтронах

 Всего               2934       46       165     259,7    386,6     336,2    305,9    305,9     305,5    274,4   274,4   274,4

   в том числе:
   федеральный       2934       46       165     259,7    386,6     336,2    305,9    305,9     305,5    274,4   274,4   274,4
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего       2934       46       165     259,7    386,6     336,2    305,9    305,9     305,5    274,4   274,4   274,4

   в том числе:
   федеральный       2934       46       165     259,7    386,6     336,2    305,9    305,9     305,5    274,4   274,4   274,4
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

              4. Разработка технологий замкнутого топливного цикла для реакторов на быстрых и тепловых нейтронах

 Всего             10117,8    118,1     444,5    1420,2   1933,4   1540,3    1335,3   1249,7   1028,9     349     359    339,4

   в том числе:
   федеральный     10117,8    118,1     444,5    1420,2   1933,4   1540,3    1335,3   1249,7   1028,9     349     359    339,4
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      6970,8     73,6      402     1207,7   1312,9    854,8    734,8    699,2     638,4     349     359    339,4

   в том числе:
   федеральный      6970,8     73,6      402     1207,7   1312,9    854,8    734,8    699,2     638,4     349     359    339,4
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные         3147      44,5     42,5     212,5    620,5     685,5    600,5    550,5     390,5      -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный       3147      44,5     42,5     212,5    620,5     685,5    600,5    550,5     390,5      -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

                        4.1. Создание полифункционального радиохимического исследовательского комплекса

 Всего              4694,8     44,5      193     527,6    957,7     901,1    794,9     746       530       -       -       -

   в том числе:
   федеральный      4694,8     44,5      193     527,6    957,7     901,1    794,9     746       530       -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      1547,8      -       150,5    315,1    337,2     215,6    194,4    195,5     139,5      -       -       -

   в том числе:
   федеральный      1547,8      -       150,5    315,1    337,2     215,6    194,4    195,5     139,5      -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные         3147      44,5     42,5     212,5    620,5     685,5    600,5    550,5     390,5      -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный       3147      44,5     42,5     212,5    620,5     685,5    600,5    550,5     390,5      -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

               4.2. Расчетно-экспериментальное обоснование условий окончательного удаления радиоактивных отходов
                                     и разработка перспективных обеспечивающих технологий

 Всего              1015,6     27,6      57        98     111,7     111,8    111,7    111,7     111,7     98      98      78,4

   в том числе:
   федеральный      1015,6     27,6      57        98     111,7     111,8    111,7    111,7     111,7     98      98      78,4
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      1015,6     27,6      57        98     111,7     111,8    111,7    111,7     111,7     98      98      78,4

   в том числе:
   федеральный      1015,6     27,6      57        98     111,7     111,8    111,7    111,7     111,7     98      98      78,4
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

          4.3. Разработка и обоснование технологических и проектно-конструкторских решений, касающихся промышленного
               пристанционного модуля переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах

 Всего               2404       46      104,5    423,4    485,9     305,4    225,7    208,5     203,6     121     140     140

   в том числе:
   федеральный       2404       46      104,5    423,4    485,9     305,4    225,7    208,5     203,6     121     140     140
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего       2404       46      104,5    423,4    485,9     305,4    225,7    208,5     203,6     121     140     140

   в том числе:
   федеральный       2404       46      104,5    423,4    485,9     305,4    225,7    208,5     203,6     121     140     140
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

     4.4. Разработка и обоснование технологических и проектно-конструкторских решений, касающихся специализированной нитки
         централизованного завода переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых и тепловых нейтронах

 Всего              2003,4      -        90      371,2    378,1      222      203     183,5     183,6     130     121     121

   в том числе:
   федеральный      2003,4      -        90      371,2    378,1      222      203     183,5     183,6     130     121     121
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      2003,4      -        90      371,2    378,1      222      203     183,5     183,6     130     121     121

   в том числе:
   федеральный      2003,4      -        90      371,2    378,1      222      203     183,5     183,6     130     121     121
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

                              II. Исследование новых способов использования энергии атомного ядра

 Всего             21213,11     -       470,9    1130,7   2161,9   2556,1     2635   3019,06   2879,4   2356,64 2275,1  1728,31

   в том числе:
   федеральный     20897,4      -       468,9    1130,7   2161,9   2556,1     2635   2901,06   2772,6   2308,3  2255,1  1707,74
   бюджет

   иные             315,71      -         2        -        -         -        -       118      106,8    48,34    20     20,57
   источники

 НИОКР - всего      8265,3      -         -       245     1126,7   1120,5    1130,4   1140,4   1127,7    810,5   788,9   775,2

   в том числе:
   федеральный      8265,3      -         -       245     1126,7   1120,5    1130,4   1140,4   1127,7    810,5   788,9   775,2
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные       12947,81     -       470,9    885,7    1035,2   1435,6    1504,6  1878,66   1751,7   1546,14 1486,2   953,11
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный     12632,1      -       468,9    885,7    1035,2   1435,6    1504,6  1760,66   1644,9   1497,8  1466,2   932,54
   бюджет

   иные             315,71      -         2        -        -         -        -       118      106,8    48,34    20     20,57
   источники

         1. Исследование свойств веществ в экстремальных состояниях (высокие температуры, давление, облучение) с целью
                          формирования баз данных для обоснования инновационных реакторных установок

 Всего               2597       -         -        -       345      349,8    354,8    359,6     364,6    269,5   274,4   279,3

   в том числе:
   федеральный       2597       -         -        -       345      349,8    354,8    359,6     364,6    269,5   274,4   279,3
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего       2597       -         -        -       345      349,8    354,8    359,6     364,6    269,5   274,4   279,3

   в том числе:
   федеральный       2597       -         -        -       345      349,8    354,8    359,6     364,6    269,5   274,4   279,3
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

         2. Разработка технологий прямого преобразования ядерной энергии в электрическую энергию и лазерное излучение

 Всего              1087,8      -         -        -      130,3     140,1     145      150      154,9    122,5   122,5   122,5

   в том числе:
   федеральный      1087,8      -         -        -      130,3     140,1     145      150      154,9    122,5   122,5   122,5
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      1087,8      -         -        -      130,3     140,1     145      150      154,9    122,5   122,5   122,5

   в том числе:
   федеральный      1087,8      -         -        -      130,3     140,1     145      150      154,9    122,5   122,5   122,5
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

                               3. Разработка нового поколения детекторов ионизирующего излучения

 Всего              866,3       -         -        -      157,4     143,6    143,6    143,7      129     70,6    44,1     34,3

   в том числе:
   федеральный      866,3       -         -        -      157,4     143,6    143,6    143,7      129     70,6    44,1     34,3
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      866,3       -         -        -      157,4     143,6    143,6    143,7      129     70,6    44,1     34,3

   в том числе:
   федеральный      866,3       -         -        -      157,4     143,6    143,6    143,7      129     70,6    44,1     34,3
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

               4. Разработка перспективных технологий для упрочнения поверхности материалов на основе лазерных,
                                          пучковых и плазменных источников излучения

 Всего              862,4       -         -        -       149      137,2    132,3    127,4     114,6    73,5    68,6     59,8

   в том числе:
   федеральный      862,4       -         -        -       149      137,2    132,3    127,4     114,6    73,5    68,6     59,8
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      862,4       -         -        -       149      137,2    132,3    127,4     114,6    73,5    68,6     59,8

   в том числе:
   федеральный      862,4       -         -        -       149      137,2    132,3    127,4     114,6    73,5    68,6     59,8
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

                           5. Исследования и разработки в области управляемого термоядерного синтеза

 Всего              2851,8      -         -       245      345      349,8    354,7    359,7     364,6    274,4   279,3   279,3

   в том числе:
   федеральный      2851,8      -         -       245      345      349,8    354,7    359,7     364,6    274,4   279,3   279,3
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего      2851,8      -         -       245      345      349,8    354,7    359,7     364,6    274,4   279,3   279,3

   в том числе:
   федеральный      2851,8      -         -       245      345      349,8    354,7    359,7     364,6    274,4   279,3   279,3
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные          -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

                                       6. Строительство термоядерного комплекса "Байкал"

 Всего               3485       -         -      212,5    297,5     467,5    467,5     510       510      510     510      -

   в том числе:
   федеральный       3485       -         -      212,5    297,5     467,5    467,5     510       510      510     510      -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные         3485       -         -      212,5    297,5     467,5    467,5     510       510      510     510      -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный       3485       -         -      212,5    297,5     467,5    467,5     510       510      510     510      -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

           7. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение современной экспериментально-стендовой базы
                                            термоядерных исследований и разработок

 Всего             8050,71      -       461,4    605,2    594,1     753,1    850,1   1124,66   1091,7   886,14   856,2   828,11

   в том числе:
   федеральный       7735       -       459,4    605,2    594,1     753,1    850,1   1006,66    984,9    837,8   836,2   807,54
   бюджет

   иные             315,71      -         2        -        -         -        -       118      106,8    48,34    20     20,57
   источники

 НИОКР - всего        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные       8050,71      -       461,4    605,2    594,1     753,1    850,1   1124,66   1091,7   886,14   856,2   828,11
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный       7735       -       459,4    605,2    594,1     753,1    850,1   1006,66    984,9    837,8   836,2   807,54
   бюджет

   иные             315,71      -         2        -        -         -        -       118      106,8    48,34    20     20,57
   источники

                         8. Реконструкция ускорительного комплекса в г. Протвино (Московская область)

 Всего              1191,1      -         -        -       50,1      165      187      244       150      150     120     125

   в том числе:
   федеральный      1191,1      -         -        -       50,1      165      187      244       150      150     120     125
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные        1191,1      -         -        -       50,1      165      187      244       150      150     120     125
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный      1191,1      -         -        -       50,1      165      187      244       150      150     120     125
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

                    9. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса электростатических ускорителей

 Всего               221        -        9,5       68      93,5      50        -        -         -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный       221        -        9,5       68      93,5      50        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 НИОКР - всего        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -

   в том числе:
   федеральный        -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники

 Капитальные         221        -        9,5       68      93,5      50        -        -         -        -       -       -
 вложения - всего

   в том числе:
   федеральный       221        -        9,5       68      93,5      50        -        -         -        -       -       -
   бюджет

   иные               -         -         -        -        -         -        -        -         -        -       -       -
   источники
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЯДЕРНЫЕ
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2010 - 2015
ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
───────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Направления  │ 2010 - │                                      В том числе
   расходов,   │  2020  ├───────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────
   источники   │ годы - │ 2010  │ 2011 │ 2012  │  2013  │ 2014  │ 2015  │  2016  │ 2017  │ 2018  │ 2019 │ 2020
 финансирования│ всего  │  год  │ год  │  год  │  год   │  год  │  год  │  год   │  год  │  год  │ год  │  год
───────────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────
 Общий объем    131464,9 4527,88 7091,1 13777,3 17910,69 18770,2 16123,2 19005,46 15486,8 8739,14 7555,5 2477,63
 финансирования
 - всего

   в том числе:

   расходы на   53768,2  2080,08 3115,8 9184,3  11414,6  7429,3  6067,7    5092   4063,3  1954,5  1901,6 1465,02
   НИОКР

   капитальные  77696,7  2447,8  3975,3  4593   6496,09  11340,9 10055,5 13913,46 11423,5 6784,64 5653,9 1012,61
   вложения

 Средства        110428  3169,98 6218,4 11308,1 15405,4  15300,6 14138,3 13954,86  12379  8560,8  7535,5 2457,06
 федерального
 бюджета -
 всего <*>

   в том числе:

   расходы на    51772   1167,48  2577  8846,9  11347,6  7367,7  5988,9    5092   4063,3  1954,5  1901,6 1465,02
   НИОКР

   капитальные   58656   2002,5  3641,4 2461,2   4057,8  7932,9  8149,4  8862,86  8315,7  6606,3  5633,9 992,04
   вложения

 Средства       21036,9  1357,9  872,7  2469,2  2505,29  3469,6  1984,9   5050,6  3107,8  178,34    20    20,57
 внебюджетных
 источников -
 всего

   в том числе:

   расходы на    1996,2   912,6  538,8   337,4     67     61,6    78,8      -        -       -      -       -
   НИОКР

   капитальные  19040,7   445,3  333,9  2131,8  2438,29   3408   1906,1   5050,6  3107,8  178,34    20    20,57
   вложения
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Объемы средств федерального бюджета уточняются при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
НА ПЕРИОД 2010 - 2015 ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────┬─────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────
 Наименование │ 2010 -  │         Средства          │          Средства
    задачи    │2020 годы│   федерального бюджета    │  внебюджетных источников
              │ - всего ├───────┬───────┬───────────┼────────┬──────┬────────────
              │         │ всего │ НИОКР │капитальные│ всего  │НИОКР │капитальные
              │         │       │       │ вложения  │        │      │ вложения
──────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────────┴────────┴──────┴────────────
 Разработка    110251,79 89530,6 43506,7   46023,9   20721,19 1996,2  18724,99
 реакторов на
 быстрых
 нейтронах с
 замкнутым
 ядерным
 топливным
 циклом

 Исследование  21213,11  20897,4 8265,3    12632,1    315,71    -      315,71
 новых
 способов
 использования
 энергии
 атомного ядра

 Итого         131464,9  110428   51772     58656    21036,9  1996,2   19040,7
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"

МЕРОПРИЯТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЯДЕРНЫЕ
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2010 - 2015
ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА", РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────
     Наименование    │2010 -│                 В том числе
     мероприятия,    │ 2020 ├─────┬─────┬──────┬───────┬─────┬─────┬───────
      источники      │годы -│2010 │2011 │ 2012 │ 2013  │2014 │2015 │2016 -
    финансирования   │всего │ год │ год │ год  │  год  │ год │ год │ 2020
                     │      │     │     │      │       │     │     │ годы
─────────────────────┴──────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴───────
 1. Разработка и      8015,6  184   490   1811  2172,3  957,5  600  1800,8
 сооружение опытно-
 демонстрационного
 энергоблока с
 реактором на быстрых
 нейтронах со
 свинцовым
 теплоносителем -
 всего

   в том числе:
   федеральный        8015,6  184   490   1811  2172,3  957,5  600  1800,8
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 2. Разработка и      3581,4 680,8 878,8 938,4    943   61,6  78,8    -
 сооружение опытно-
 промышленного
 энергоблока с
 реакторной
 установкой на
 быстрых нейтронах со
 свинцово-висмутовым
 теплоносителем -
 всего

   в том числе:
   федеральный         1817    -    340   601     876     -     -     -
   бюджет

   иные источники     1764,4 680,8 538,8 337,4    67    61,6  78,8    -

 3. Разработка         5366   184   380  1542,5 1544,1  710,7 710,7  294
 энергоблока нового
 поколения с
 реактором на быстрых
 нейтронах с
 натриевым
 теплоносителем -
 всего

   в том числе:
   федеральный         5366   184   380  1542,5 1544,1  710,7 710,7  294
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 4. Разработка        3946,9 55,18 128,5 659,5   907,5  778,1 437,3 980,82
 интегрированных
 систем кодов нового
 поколения для
 анализа и
 обоснования
 безопасности
 перспективных
 атомных
 электростанций и
 ядерного топливного
 цикла - всего

   в том числе:
   федеральный        3946,9 55,18 128,5 659,5   907,5  778,1 437,3 980,82
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 5. Разработка        3645,7 350,5  266  803,5  1117,9  782,9 298,9   26
 проекта
 многоцелевого
 исследовательского
 реактора на быстрых
 нейтронах МБИР -
 всего

   в том числе:
   федеральный        3413,9 118,7  266  803,5  1117,9  782,9 298,9   26
   бюджет

   иные источники     231,8  231,8   -     -       -      -     -     -

 6. Техническое       485,9    -    100   100     60     50   45,9   130
 перевооружение
 опытного реактора на
 быстрых нейтронах
 тепловой мощностью
 60 МВт - всего

   в том числе:
   федеральный        485,9    -    100   100     60     50   45,9   130
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 7. Техническое       1073,5   -     -    290     290    260   210   23,5
 перевооружение
 комплекса больших
 физических стендов
 для моделирования
 реакторов на быстрых
 нейтронах и их
 топливных циклов -
 всего

   в том числе:
   федеральный        1073,5   -     -    290     290    260   210   23,5
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 8. Разработка        669,1   460  140,5   49    19,6     -     -     -
 технологий
 производства
 уранплутониевого
 оксидного топлива
 для реакторов на
 быстрых нейтронах -
 всего

   в том числе:
   федеральный        669,1   460  140,5   49    19,6     -     -     -
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 9. Разработка         8814   46    165   1278   1534   1517  1515   2759
 технологий
 производства
 плотного топлива для
 реакторов на быстрых
 нейтронах - всего

   в том числе:
   федеральный         8814   46    165   1278   1534   1517  1515   2759
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 10. Разработка        2934   46    165  259,7   386,6  336,2 305,9 1434,6
 перспективных
 конструкционных
 материалов для
 реакторов на быстрых
 и тепловых нейтронах
 - всего

   в том числе:
   федеральный         2934   46    165  259,7   386,6  336,2 305,9 1434,6
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 11. Создание         1547,8   -   150,5 315,1   337,2  215,6 194,4  335
 полифункционального
 радиохимического
 исследовательского
 комплекса - всего

   в том числе:
   федеральный        1547,8   -   150,5 315,1   337,2  215,6 194,4  335
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 12. Расчетно-        1015,6 27,6   57     98    111,7  111,8 111,7 497,8
 экспериментальное
 обоснование условий
 окончательного
 удаления
 радиоактивных
 отходов и разработка
 перспективных
 обеспечивающих
 технологий - всего

   в том числе:
   федеральный        1015,6 27,6   57     98    111,7  111,8 111,7 497,8
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 13. Разработка и      2404   46   104,5 423,4   485,9  305,4 225,7 813,1
 обоснование
 технологических и
 проектно-
 конструкторских
 решений, касающихся
 промышленного
 пристанционного
 модуля переработки
 отработавшего
 ядерного топлива
 реакторов на быстрых
 нейтронах, - всего

   в том числе:
   федеральный         2404   46   104,5 423,4   485,9  305,4 225,7 813,1
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 14. Разработка и     2003,4   -    90   371,2   378,1   222   203  739,1
 обоснование
 технологических и
 проектно-
 конструкторских
 решений, касающихся
 специализированной
 нитки
 централизованного
 завода переработки
 отработавшего
 ядерного топлива
 реакторов на быстрых
 и тепловых
 нейтронах, - всего

   в том числе:
   федеральный        2003,4   -    90   371,2   378,1   222   203  739,1
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 15. Исследование      2597    -     -     -      345   349,8 354,8 1547,4
 свойств веществ в
 экстремальных
 состояниях (высокие
 температуры,
 давление, облучение)
 с целью формирования
 баз данных для
 обоснования
 инновационных
 реакторных установок
 - всего

   в том числе:
   федеральный         2597    -     -     -      345   349,8 354,8 1547,4
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 16. Разработка       1087,8   -     -     -     130,3  140,1  145  672,4
 технологий прямого
 преобразования
 ядерной энергии в
 электрическую
 энергию и лазерное
 излучение - всего

   в том числе:
   федеральный        1087,8   -     -     -     130,3  140,1  145  672,4
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 17. Разработка       866,3    -     -     -     157,4  143,6 143,6 421,7
 нового поколения
 детекторов
 ионизирующего
 излучения - всего

   в том числе:
   федеральный        866,3    -     -     -     157,4  143,6 143,6 421,7
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 18. Разработка       862,4    -     -     -      149   137,2 132,3 443,9
 перспективных
 технологий для
 упрочнения
 поверхности
 материалов на основе
 лазерных, пучковых и
 плазменных
 источников излучения
 - всего

   в том числе:
   федеральный        862,4    -     -     -      149   137,2 132,3 443,9
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -

 19. Исследования и   2851,8   -     -    245     345   349,8 354,7 1557,3
 разработки в области
 управляемого
 термоядерного
 синтеза - всего

   в том числе:
   федеральный        2851,8   -     -    245     345   349,8 354,7 1557,3
   бюджет

   иные источники       -      -     -     -       -      -     -     -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"

МЕРОПРИЯТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЯДЕРНЫЕ
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2010 - 2015
ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТЕНДОВОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
───────────────────────────┬──────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────
       Наименование        │  Источники   │ 2010 -│                  В том числе                   │   Срок   │Основные результаты
       мероприятия,        │финансирования│ 2020  ├─────┬─────┬──────┬───────┬──────┬──────┬───────┤реализации│
       исполнитель         │              │ годы -│2010 │2011 │ 2012 │ 2013  │ 2014 │ 2015 │ 2016 -│          │
                           │              │ всего │ год │ год │ год  │  год  │ год  │ год  │ 2020  │          │
                           │              │       │     │     │      │       │      │      │ годы  │          │
───────────────────────────┴──────────────┴───────┴─────┴─────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────────┴────────────────────
                                      I. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

 1.  Строительство на базе  всего          17682,9   -     -    230     250    240    550   16412,9   2012 -   опытно-
     Белоярской атомной                                                                                2019    демонстрационный
     электростанции опытно- в том числе:                                                               годы    энергоблок с
     демонстрационного      федеральный    17682,9   -     -    230     250    240    550   16412,9            реактором на
     энергоблока с          бюджет <*>                                                                         быстрых нейтронах
     реактором на быстрых                                                                                      со свинцовым
     нейтронах со свинцовым иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               теплоносителем
     теплоносителем                                                                                            электрической
      федеральное                                                                                              мощностью 300 МВт
      государственное
      унитарное
      предприятие
      "Государственный
      научный центр
      Российской Федерации
      - Физико-
      энергетический
      институт имени
      А.И. Лейпунского", г.
      Обнинск, Калужская
      область

 2.  Строительство опытно-  всего          9646,8  605,2 94,5  258,9   377,8  1923,1 2573,7 3813,6    2010 -   опытно-промышленный
     промышленного                                                                                     2018    энергоблок с
     энергоблока с                                                                                     годы    реактором на
     реакторной установкой                                                                                     быстрых нейтронах
     на быстрых нейтронах                                                                                      со свинцово-
     со свинцово-висмутовым                                                                                    висмутовым
     теплоносителем в                                                                                          теплоносителем
     Мелекесском районе                                                                                        электрической
     Ульяновской области                                                                                       мощностью 100 МВт
     (г. Димитровград)
      федеральное           всего           605,2  605,2   -     -       -      -      -       -       2010
      государственное                                                                                  год
      унитарное             федеральный      178    178    -     -       -      -      -       -
      предприятие           бюджет
      "Государственный
      научный центр         иные источники  427,2  427,2   -     -       -      -      -       -
      Российской Федерации
      - Физико-
      энергетический
      институт имени
      А.И. Лейпунского", г.
      Обнинск, Калужская
      область,

      открытое акционерное  всего          9041,6    -   94,5  258,9   377,8  1923,1 2573,7 3813,6    2011 -
      общество                                                                                         2018
      "Государственный      федеральный     1753     -     -     -       -    855,4  897,6     -       годы
      научный центр -       бюджет
      Научно-
      исследовательский     иные источники 7288,6    -   94,5  258,9   377,8  1067,7 1676,1 3813,6
      институт атомных
      реакторов", г.
      Димитровград,
      Ульяновская область

 3.  Строительство          всего          12786,5   -   237,4 317,4  1128,4  2996,1 2663,1 5444,1    2011 -   многоцелевой
     многоцелевого                                                                                     2019    исследовательский
     исследовательского     в том числе:                                                               годы    реактор на быстрых
     реактора на быстрых    федеральный     11390    -     -     -     816,7  2696,1 2433,1 5444,1             нейтронах МБИР для
     нейтронах МБИР         бюджет                                                                             проведения
      открытое акционерное                                                                                     реакторных
      общество              иные источники 1396,5    -   237,4 317,4   311,7   300    230      -               исследований, в том
      "Государственный                                                                                         числе для испытаний
      научный центр -                                                                                          новых видов
      Научно-                                                                                                  топлива, различных
      исследовательский                                                                                        теплоносителей,
      институт атомных                                                                                         топливных и
      реакторов", г.                                                                                           конструкционных
      Димитровград,                                                                                            материалов.
      Ульяновская область                                                                                      Тепловая мощность
                                                                                                               МБИР - 150 МВт

 4.  Техническое перевоору- всего            555     -     -     -     51,7    104   113,6   285,7    2013 -   опытный реактор на
     жение опытного                                                                                    2020    быстрых нейтронах
     реактора на быстрых    в том числе:                                                               годы    тепловой мощностью
     нейтронах тепловой     федеральный      555     -     -     -     51,7    104   113,6   285,7             60 МВт с заменой
     мощностью 60 МВт       бюджет                                                                             оборудования и
      открытое акционерное                                                                                     элементов,
      общество              иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               выработавших ресурс
      "Государственный
      научный центр -
      Научно-
      исследовательский
      институт атомных
      реакторов", г.
      Димитровград,
      Ульяновская область

 5.  Техническое            всего            550     -    30     45     120    180    150     25      2011 -   технически
     перевооружение                                                                                    2016    перевооруженный
     комплекса больших      в том числе:                                                               годы    комплекс больших
     физических стендов для федеральный      550     -    30     45     120    180    150     25               физических стендов
     моделирования          бюджет <*>                                                                         для моделирования
     реакторов на быстрых                                                                                      реакторов на
     нейтронах и их         иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               быстрых нейтронах и
     топливных циклов                                                                                          их топливных
      федеральное                                                                                              циклов. Площадь
      государственное                                                                                          технического
      унитарное                                                                                                перевооружения
      предприятие                                                                                              стендов - 5000 кв.
      "Государственный                                                                                         м
      научный центр
      Российской Федерации
      - Физико-
      энергетический
      институт имени
      А.И. Лейпунского", г.
      Обнинск, Калужская
      область

 6.  Реконструкция          всего          1191,1    -     -     -     50,1    165    187     789     2013 -   реконструированный
     ускорительного                                                                                    2020    ускорительный
     комплекса в г.         в том числе:                                                               годы    комплекс в г.
     Протвино, Московская   федеральный    1191,1    -     -     -     50,1    165    187     789              Протвино с энергией
     область                бюджет <*>                                                                         пучка протонов
      федеральное                                                                                              адронного
      государственное       иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               ускорителя до 60
      унитарное                                                                                                ГэВ
      предприятие
      "Государственный
      научный центр
      Российской Федерации
      - Институт физики
      высоких энергий", г.
      Протвино, Московская
      область

 7.  Реконструкция и        всего            221     -    9,5    68    93,5     50     -       -      2011 -   комплекс
     техническое                                                                                    2014 годы  реконструированных
     перевооружение         в том числе:                                                                       электростатических
     комплекса              федеральный      221     -    9,5    68    93,5     50     -       -               ускорителей с
     электростатических     бюджет <*>                                                                         параметрами,
     ускорителей                                                                                               соответствующими
      федеральное           иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               уровню современных
      государственное                                                                                          зарубежных
      унитарное предприятие                                                                                    электростатических
      "Государственный                                                                                         ускорителей.
      научный центр                                                                                            Площадь
      Российской                                                                                               технического
      Федерации -                                                                                              перевооружения
      Физико-энергетический                                                                                    электростатических
      институт имени                                                                                           ускорителей - 2600
      А.И. Лейпунского",                                                                                       кв. м
      г. Обнинск, Калужская
      область

 8.  Строительство          всего          9164,59 1157  2363  1855,5 1748,79 2040,3   -       -      2010 -   топливный комплекс
     промышленного                                                                                     2014    по изготовлению
     производства МОКС-     в том числе:                                                               годы    уранплутониевого
     топлива для            федеральный     3820   1157  2363   300      -      -      -       -               оксидного топлива
     энергоблока N 4        бюджет <*>                                                                         на основе
     Белоярской АЭС с                                                                                          технологии
     реактором БН-800 на    иные источники 5344,59   -     -   1555,5 1748,79 2040,3   -       -               вихревого
     ФГУП "ГХК", г.                                                                                            смешивания
     Железногорск,                                                                                             мощностью 400
     Красноярский край                                                                                         тепловыделяющих
      федеральное                                                                                              сборок в год
      государственное
      унитарное
      предприятие "Горно-
      химический
      комбинат", г.
      Железногорск,
      Красноярский край

 9.  Техническое            всего           1670    445   737   488      -      -      -       -      2010 -   топливный комплекс
     перевооружение                                                                                    2012    по изготовлению
     топливного комплекса   в том числе:                                                               годы    уранплутониевого
     для производства       федеральный     1670    445   737   488      -      -      -       -               оксидного топлива
     тепловыделяющих сборок бюджет                                                                             на основе
      открытое акционерное                                                                                     технологии
      общество              иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               виброуплотнения,
      "Государственный                                                                                         обеспечивающий
      научный центр -                                                                                          производство 60
      Научно-                                                                                                  тепловыделяющих
      исследовательский                                                                                        сборок в год
      институт атомных
      реакторов", г.
      Димитровград,
      Ульяновская область

 10. Техническое            всего           196,1  196,1   -     -       -      -      -       -       2010    производство по
     перевооружение                                                                                    год     выпуску элементов
     производства по        в том числе:                                                                       активной зоны и
     выпуску элементов      федеральный      178    178    -     -       -      -      -       -               комплектующих
     активной зоны и        бюджет                                                                             тепловыделяющих
     комплектующих                                                                                             элементов (с
     тепловыделяющих        иные источники  18,1   18,1    -     -       -      -      -       -               годовой
     элементов и сборок                                                                                        производительностью
     уранплутониевого                                                                                          60000 комплектов) и
     оксидного топлива                                                                                         сборок (с годовой
      открытое акционерное                                                                                     производительностью
      общество                                                                                                 400 комплектов)
      "Машиностроительный                                                                                      уранплутониевого
      завод", г.                                                                                               оксидного топлива
      Электросталь,
      Московская область

 11. Строительство          всего           9350     -     -    300   1163,7  1736,3  1900   4250     2012 -   промышленный
     комплекса по                                                                                      2017    комплекс по
     производству плотного  в том числе:                                                               годы    производству
     топлива для реакторов  федеральный     5100     -     -    300   1163,7  1736,3  1900     -               плотного топлива
     на быстрых нейтронах   бюджет <*>                                                                         для реакторов на
      федеральное                                                                                              быстрых нейтронах.
      государственное       иные источники  4250     -     -     -       -      -      -     4250              Производительность
      унитарное                                                                                                комплекса по
      предприятие                                                                                              топливу - 14 т в
      "Производственное                                                                                        год
      объединение "Маяк",
      г. Озерск,
      Челябинская область

 12. Строительство          всего           2720     -     -     -      493   685,5  600,5    941     2013 -   полифункциональный
     полифункционального                                                                               2017    радиохимический
     радиохимического       в том числе:                                                               годы    исследовательский
     исследовательского     федеральный     2720     -     -     -      493   685,5  600,5    941              комплекс.
     комплекса              бюджет                                                                             Производительность
      открытое акционерное                                                                                     создаваемого
      общество              иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               комплекса - 10
      "Государственный                                                                                         процентов
      научный центр -                                                                                          производительности
      Научно-                                                                                                  будущего
      исследовательский                                                                                        промышленного
      институт атомных                                                                                         модуля, 1 - 2 т
      реакторов", г.                                                                                           отходов ядерного
      Димитровград,                                                                                            топлива в год
      Ульяновская область

 13. Реконструкция и        всего            427   44,5  42,5  212,5   127,5    -      -       -      2010 -   комплекс установок
     техническое                                                                                       2013    для отработки
     перевооружение         в том числе:                                                               годы    процессов
     лабораторного          федеральный      427   44,5  42,5  212,5   127,5    -      -       -               фторирования и
     комплекса для          бюджет <*>                                                                         фракционирования
     отработки и                                                                                               отходов ядерного
     экспериментального     иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               топлива в смесях
     обоснования                                                                                               урана, плутония с
     инновационных                                                                                             мощностью 500 кг в
     пирохимических                                                                                            год
     технологий для
     замкнутого топливного
     цикла
      федеральное
      государственное
      унитарное
      предприятие
      "Российский
      Федеральный Ядерный
      Центр -
      Всероссийский
      научно-
      исследовательский
      институт технической
      физики имени
      академика
      Е.И. Забабахина", г.
      Снежинск,
      Челябинская область

 14. Строительство          всего           3485     -     -   212,5   297,5  467,5  467,5   2040     2012 -   термоядерный
     термоядерного                                                                                     2019    комплекс "Байкал"
     комплекса "Байкал"     в том числе:                                                               годы    для исследований
      федеральное           федеральный     3485     -     -   212,5   297,5  467,5  467,5   2040              инерционного
      государственное       бюджет, <*>                                                                        термоядерного
      унитарное                                                                                                синтеза,
      предприятие           иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               верификации кодов в
      "Государственный                                                                                         условиях отсутствия
      научный центр                                                                                            полигонных
      Российской Федерации                                                                                     испытаний (пуск на
      Троицкий институт                                                                                        излучающую нагрузку
      инновационных и                                                                                          с термоядерной
      термоядерных                                                                                             мишенью с током
      исследований", г.                                                                                        50 МА и временем
      Троицк, Московская                                                                                       нарастания 150 нс.
      область                                                                                                  Количество пусков -
                                                                                                               50 в год, время
                                                                                                               работы установки -
                                                                                                               20 лет)

 15. Техническое            всего           335,8    -   13,4   51,8   34,9    32,3    34    169,4    2011 -   реконструированные
     перевооружение                                                                                    2020    стенды нейтронной
     токамака Т-11М,        в том числе:                                                               годы    диагностики,
     объектов               федеральный     335,8    -   13,4   51,8   34,9    32,3    34    169,4             активной
     технологического       бюджет <*>                                                                         рефрактометрии и
     центра и                                                                                                  спектроскопии;
     информационной сети    иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               модернизированные
     управляемого                                                                                              вакуумные системы;
     термоядерного синтеза                                                                                     системы
      федеральное                                                                                              электропитания и
      государственное                                                                                          управления
      унитарное                                                                                                установки Т-11М для
      предприятие                                                                                              отработки режимов,
      "Государственный                                                                                         близких к условиям
      научный центр                                                                                            термоядерного
      Российской Федерации                                                                                     реактора.
      Троицкий институт                                                                                        Количество надежных
      инновационных и                                                                                          пусков -
      термоядерных                                                                                             1600 в год.
      исследований", г.                                                                                        Площадь
      Троицк, Московская                                                                                       технического
      область                                                                                                  перевооружения
                                                                                                               технологического
                                                                                                               центра и
                                                                                                               информационной
                                                                                                               сети - 1470 кв. м

 16. Реконструкция          всего           378,4    -    1,5   31,6   38,4    48,2   51,5   207,2    2011 -   стенд для отработки
     экспериментально-                                                                                 2020    технологии
     технологической базы   в том числе:                                                               годы    изготовления и
     для отработки          федеральный     378,4    -    1,5   31,6   38,4    48,2   51,5   207,2             исследования
     технологии             бюджет <*>                                                                         характеристик
     изготовления и                                                                                            элементов модуля
     исследования           иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               бланкета для
     характеристик                                                                                             термоядерного
     элементов модулей                                                                                         реактора с литиевым
     бланкета                                                                                                  охлаждением.
      федеральное                                                                                              Площадь
      государственное                                                                                          реконструируемого
      унитарное                                                                                                производственного
      предприятие "Научно-                                                                                     участка - 1900 кв.
      исследовательский                                                                                        м
      институт
      электрофизической
      аппаратуры им.
      Д.В. Ефремова", г.
      Санкт-Петербург

 17. Реконструкция          всего           28,7     -    1,1   4,1     4,5    4,9    5,7     8,4     2011 -   реконструированный
     экспериментальной базы                                                                            2016    стенд "Плазматех-М"
     стенда "Плазматех-М"   в том числе:                                                               годы    для отработки и
      федеральное           федеральный     28,7     -    1,1   4,1     4,5    4,9    5,7     8,4              проведения
      государственное       бюджет                                                                             испытаний
      унитарное                                                                                                материалов
      предприятие "Научно-  иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               термоядерного
      исследовательский                                                                                        реактора. Площадь
      институт                                                                                                 реконструированного
      электрофизической                                                                                        стенда - 500 кв. м
      аппаратуры им.
      Д.В. Ефремова", г.
      Санкт-Петербург

 18. Техническое            всего           21,2     -   0,84   4,3     4,3    4,2    3,8    3,76     2011 -   стендовая база для
     перевооружение                                                                                    2016    отработки
     стендовой базы         в том числе:                                                               годы    технологий
     федерального           федеральный     21,2     -   0,84   4,3     4,3    4,2    3,8    3,76              улучшения свойств
     государственного       бюджет <*>                                                                         материалов,
     унитарного предприятия                                                                                    применяемых в
     "Научно-               иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               термоядерных
     исследовательский                                                                                         реакторах. Площадь
     институт                                                                                                  реконструированной
     электрофизической                                                                                         стендовой базы -
     аппаратуры им.                                                                                            222,7 кв. м
     Д.В. Ефремова", г.
     Санкт-Петербург

 19. Техническое            всего          525,57    -   64,6   66,3   66,3    54,4   56,9  217,07    2011 -   комплекс стендов и
     перевооружение                                                                                    2020    опытных участков по
     комплекса              в том числе:                                                               годы    разработке,
     конструкционных и      федеральный      425     -   64,6   66,3   66,3    54,4   56,9   116,5             созданию и изучению
     сверхпроводящих        бюджет                                                                             качества и
     материалов, объектов                                                                                      аттестации
     информационной сети    иные источники 100,57    -     -     -       -      -      -    100,57             конструкционных и
     управляемого                                                                                              сверхпроводящих
     термоядерного синтеза                                                                                     материалов. Площадь
      открытое акционерное                                                                                     технического
      общество                                                                                                 перевооружения
      "Высокотехнологичес-                                                                                     стендов, опытных
      кий научно-                                                                                              участков и объектов
      исследовательский                                                                                        информационной
      институт                                                                                                 сети - 1513,3 кв. м
      неорганических
      материалов имени
      академика
      А.А. Бочвара", г.
      Москва

 20. Техническое            всего          644,34    -   58,56  45,9   46,7    31,5    31   430,68    2011 -   объекты
     перевооружение                                                                                    2020    технологического
     объектов               в том числе:                                                               годы    центра и
     технологического       федеральный     429,2    -   56,56  45,9   46,7    31,5    31   217,54             информационной сети
     центра и               бюджет                                                                             для отработки
     информационной сети                                                                                       технологии
     управляемого           иные источники 215,14    -     2     -       -      -      -    213,14             изготовления и
     термоядерного синтеза                                                                                     исследования
      открытое акционерное                                                                                     характеристик
      общество "Ордена                                                                                         полномасштабного
      Ленина Научно-                                                                                           модуля бланкета.
      исследовательский и                                                                                      Площадь
      конструкторский                                                                                          технического
      институт                                                                                                 перевооружения
      энерготехники имени                                                                                      объектов
      Н.А. Доллежаля", г.                                                                                      технологического
      Москва                                                                                                   центра и
                                                                                                               информационной сети
                                                                                                               - 1367,38 кв. м

 21. Техническое            всего           130,9    -    5,2   17,9   24,2     14    13,7   55,9     2011 -   техническое
     перевооружение                                                                                    2020    перевооружение
     объектов               в том числе:                                                               годы    комплекса топливных
     технологического       федеральный     130,9    -    5,2   17,9   24,2     14    13,7   55,9              технологий токамака
     центра и               бюджет <*>                                                                         для отработки
     информационной сети                                                                                       систем подпитки
     управляемого           иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               топливом токамака
     термоядерного синтеза                                                                                     реактора. Площадь
      федеральное                                                                                              технического
      государственное                                                                                          перевооружения
      унитарное                                                                                                комплекса - 730,6
      предприятие                                                                                              кв. м
      "Российский
      федеральный ядерный
      центр -
      Всероссийский
      научно-
      исследовательский
      институт
      экспериментальной
      физики", г. Саров,
      Нижегородская
      область

 22. Техническое            всего           58,7     -    2,3   5,9     5,9     6      6     32,6     2011 -   техническое
     перевооружение                                                                                    2020    перевооружение
     объектов               в том числе:                                                               годы    лаборатории
     технологического       федеральный     58,7     -    2,3   5,9     5,9     6      6     32,6              литиевых технологий
     центра и               бюджет <*>                                                                         для отработки
     информационной сети                                                                                       литиевых
     управляемого           иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -               внутрикамерных
     термоядерного синтеза                                                                                     элементов токамака
      федеральное                                                                                              реактора. Площадь
      государственное                                                                                          технического
      унитарное                                                                                                перевооружения
      предприятие "Красная                                                                                     лаборатории - 700
      звезда", г. Москва                                                                                       кв. м

          II. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"

 23. Техническое            всего          5927,1    -   313,9 377,4   368,9  557,6  647,5  3661,8    2011 -   модернизированная
     перевооружение                                                                                    2020    установка токамак
     экспериментальной      в том числе:                                                               годы    Т-15. Максимальная
     термоядерной установки федеральный    5927,1    -   313,9 377,4   368,9  557,6  647,5  3661,8             потребляемая
     токамак Т-15           бюджет                                                                             мощность - 250
      федеральное             из них                                                                           мегавольт-ампер при
      государственное         проектные     214,9    -    145   69,9     -      -      -       -               длительности
      бюджетное учреждение    работы                                                                           импульса 30 с
      "Национальный
      исследовательский     иные источники    -      -     -     -       -      -      -       -
      центр "Курчатовский
      институт", г. Москва
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Включая проектно-изыскательские работы.

Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2010 - 2015 ГОДОВ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)

─────────────────────┬─────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬──────
     Наименование    │ Единица │2010│2011│2012│2013│2014│2015│2016│2017│2018│2019 │2020
      показателя     │измерения│год │год │год │год │год │год │год │год │год │ год │ год
─────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────
 Вклад атомной        процентов 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,67 0,68 0,68 0,70  0,71
 отрасли в валовой
 внутренний продукт
 страны за счет
 повышения уровня
 коммерциализации
 технологий и
 увеличения выпуска
 высокотехнологичной
 инновационной
 продукции

 Вклад отрасли в      процентов 1,19 1,22 1,24 1,24 1,24 1,24 1,26 1,28 1,28 1,32  1,34
 объем произведенной
 промышленной
 продукции страны за
 счет реализации
 мероприятий
 Программы

 Поступление налогов    млрд.   1,18 1,71 2,93 3,63 4,08  5   6,37 7,14 7,86 10,53 13,37
 в бюджет              рублей
 в связи с
 реализацией
 мероприятий
 Программы
 (в ценах 2009 года)

 Темп роста экспорта  процентов 4,78 4,85 4,87 4,91 5,4  6,83 7,03 7,16 7,24 7,79  7,95
 высокотехнологичного
 оборудования, работ
 и услуг в области
 использования
 атомной энергии

 Средний возраст         лет     46   46  45,5  45  44,5  44  43,5  43  42,5 42,5   42
 исследователей и
 разработчиков в
 области
 использования
 атомной энергии
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2010 - 2015 ГОДОВ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

Настоящая методика определяет порядок расчета социально-экономической и бюджетной эффективности федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа). Содержащиеся в настоящей методике описания расчетов эффективности Программы основываются на базовых принципах экономического анализа, в том числе таких, как дефлирование стоимостных показателей в инфляционной экономике, дисконтирование денежных потоков. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности Программы основывается на системе показателей и индикаторов, которые позволяют осуществлять постоянный анализ ее результативности, используя распространенный в современной практике индикативный подход.
Расчет социально-экономической эффективности Программы осуществляется на 2 уровнях: макроуровне и микроуровне.
На макроуровне оцениваются такие показатели, как вклад Программы в прирост валового внутреннего продукта, а также прирост доли инновационной продукции в объеме произведенной промышленной продукции страны. Эти показатели отражают только прямой и минимальный вклад в социально-экономическую эффективность Программы на макроуровне во временных рамках ее реализации.
На микроуровне основными показателями являются темпы увеличения экспорта высокотехнологичного оборудования, работ и услуг в области использования атомной энергии, а также средний возраст исследователей и разработчиков в области использования атомной энергии.
При расчете роста вклада атомной отрасли в валовый внутренний продукт страны вследствие повышения уровня коммерциализации технологий и увеличения выпуска высокотехнологичной инновационной продукции (в процентах) используется отношение объема производства и реализации новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции (в том числе экспортные поставки), а также объема привлекаемых для реализации Программы внебюджетных средств к объему валового внутреннего продукта. Годовые приросты полученного соотношения отражают минимальный вклад Программы в прирост валового внутреннего продукта.
Увеличение вклада отрасли в объем произведенной промышленной продукции страны за счет реализации мероприятий Программы (в процентах) определяется частным, полученным от деления объемов произведенной промышленной продукции атомной отрасли с учетом реализации мероприятий Программы на объемы произведенной промышленной продукции страны (без учета Программы). Прирост этого показателя отражает минимальный вклад Программы в увеличение объемов промышленной продукции страны.
Темпы увеличения экспорта высокотехнологичного оборудования, работ и услуг в области использования атомной энергии (Tэ) рассчитываются по следующей формуле:

Тэ = (Vi - Vi-1)/Vi-1 x 100%,

где:
Vi и Vi-1 - объемы экспорта высокотехнологичного оборудования, работ и услуг в области использования атомной энергии в i-м и i-1-м годах соответственно.
Средний возраст исследователей и разработчиков в области использования атомной энергии характеризует процесс воспроизводства и обновления кадров, рост привлекательности сферы атомной науки и техники для молодежи. Значения этого показателя содержатся в ежегодной обязательной отчетности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
Расчет бюджетной эффективности Программы состоит в сопоставлении расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы с доходами, которые может получить федеральный бюджет от их реализации. При этом стоимость денежных потоков, выраженная в ценах текущих лет, приводится к единому году (таким годом будет считаться год, предшествующий началу реализации Программы, - 2009 год).
Приведение будущих денежных потоков к году начала реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

                               t            i
                         V0 = SUM Vi/(1 + r) ,
                              i=1

где:
V0 - стоимость денежных потоков, приведенная к 2009 году;
Vi - стоимость денежных потоков в i-м году;
i = 1... t - временной период;
r - ставка дисконтирования.
Для оценки бюджетной эффективности Программы ставка дисконтирования определена экспертно с учетом прогнозов темпов инфляции в экономике и возможных альтернатив использования расходуемых бюджетных средств.
Для оценки бюджетной эффективности Программы использованы налоговые поступления в бюджеты всех уровней от реализации мероприятий Программы нарастающим итогом с учетом дисконтирования (млрд. рублей, в ценах 2009 года).
В качестве показателя доходов в бюджеты всех уровней использованы налоговые поступления от реализации мероприятий Программы, то есть получаемые значения будут отражать только прямой и минимальный вклад Программы в бюджетную эффективность.
При оценке бюджетной эффективности Программы определены следующие базовые источники налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализации мероприятий Программы:
налоговые поступления от дополнительно произведенной продукции (базой для расчета выступает объем дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных передовых технологий в области использования атомной энергии), налоги на добавленную стоимость и прибыль, единый социальный налог, отчисления от фонда оплаты труда, налог на основные фонды и др.;
налоги в рамках затрат на реализацию Программы (единый социальный налог, отчисления от фонда оплаты труда и др.).
На основе выделенных групп налоговых поступлений в бюджеты всех уровней рассчитывается искомый показатель, представляющий собой сумму указанных поступлений. Далее рассчитывается сумма налоговых поступлений с учетом дисконтирующего множителя.
Коэффициент бюджетной эффективности Программы рассчитывается в процентах.
В числителе этого показателя находится дисконтированная сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в знаменателе - дисконтированное бюджетное финансирование Программы.

Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"

РАСЧЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРИОД
2010 - 2015 ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)

Эффективность федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа) определяется по системе целевых индикаторов и показателей, отражающих приоритеты развития экономики России, в соответствии с методикой расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 139/82н, а также с Налоговым кодексом Российской Федерации, действующими отраслевыми положениями и нормативами.
Экономическая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями.
Вклад атомной отрасли в валовый внутренний продукт страны за счет повышения уровня коммерциализации технологий и увеличения выпуска высокотехнологичной инновационной продукции в 2020 году составит 0,71 процента.
Вклад отрасли в объем произведенной промышленной продукции страны за счет реализации мероприятий Программы составит в 2020 году 1,34 процента.
Выполнение Программы в полном объеме позволит обеспечить поступление в федеральный бюджет налогов в объеме свыше 63 млрд. рублей (в ценах 2009 года) при 78,9 млрд. рублей бюджетных затрат на реализацию Программы (в ценах 2009 года). Таким образом, коэффициент бюджетной эффективности Программы составит 0,81.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2011 N 810)
При проведении оценки бюджетной эффективности Программа рассматривалась как инвестиционный проект с большой долей инвестиций из федерального бюджета.
Налоговые поступления в федеральный бюджет определяются как налоговые поступления от выполнения мероприятий Программы и от продажи продукции гражданского назначения, полученной за счет реализации мероприятий Программы.
Все налоги исчисляются по существующим ставкам. Налог на доходы физических лиц и единый социальный налог рассчитываются исходя из прогнозируемого размера фонда оплаты труда, а налог на прибыль - из прогнозируемой налогооблагаемой прибыли.
Значения индексов-дефляторов для приведения планируемых финансовых потоков к расчетному году, а также прогнозируемые объемы валового внутреннего продукта и отгруженной продукции определены в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 мая 2009 г. N 7293-АК/Д-03.