Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2010 г. N 17733

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 марта 2010 г. N 114

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ
УЧАСТВУЕТ ГОСУДАРСТВО, И СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5978) и в соответствии с пунктом 4.4.3 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4088, N 52 (ч. II), ст. 6586; 2010, N 9, ст. 960), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
форму инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций согласно приложениям N 1 - 6;
форму отчета о выполнении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций за квартал согласно приложениям N 7 - 13.
2. Установить, что графики строительства объектов электроэнергетики в составе инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, составляются по форме согласно приложению N 3.
3. Рекомендовать субъектам электроэнергетики представлять в Министерство энергетики Российской Федерации графики реализации инвестиционных программ с указанием этапов строительства объектов электроэнергетики по форме согласно приложению N 14.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр
С.И.ШМАТКО

Приложение N 1.1
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. N 114

                                 Перечень
        инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
                    программы и план их финансирования

                                                                 Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                   "__" _________ 20__ года
                                                                       М.П.

┌────┬──────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐
│N N │   Наименование объекта   │Стадия │Проектная│Год   │Год    │Полная │Оста-  │План  │     Ввод мощностей     │  Объем финансирования <4> │
│    │                          │реали- │мощность/│начала│окон-  │стои-  │точная │финан-├──────┬─────┬─────┬─────┼──────┬──────┬──────┬──────┤
│    │                          │зации  │протяжен-│строи-│чания  │мость  │стои-  │сиро- │ план │план │план │итого│ план │ план │ план │итого │
│    │                          │проек- │ность се-│тель- │строи- │строи- │мость  │вания │года N│года │года │     │года N│года N│года N│      │
│    │                          │та     │тей      │ства  │тельст-│тельс- │строи- │теку- │      │N + 1│N + 2│     │      │ + 1  │  + 2 │      │
│    │                          │       │         │      │ва     │тва <2>│тельс- │щего  │      │     │ <3> │     │      │      │  <3> │      │
│    │                          │       │         │      │       │       │тва <2>│года  │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │                          ├───────┼─────────┤      │       ├───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                          │С/П <1>│МВт/Гкал/│      │       │ млн.  │ млн.  │ млн. │ МВт/ │МВт/ │МВт/ │ МВт/│ млн  │ млн. │ млн. │ млн. │
│    │                          │       │ч/км/МВА │      │       │рублей │рублей │рублей│Гкал/ │Гкал/│Гкал/│Гкал/│рублей│рублей│рублей│рублей│
│    │                          │       │         │      │       │       │       │      │ч/км/ │ч/км/│ч/км/│ч/км/│      │      │      │      │
│    │                          │       │         │      │       │       │       │      │ МВА  │ МВА │ МВА │ МВА │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │          ВСЕГО           │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1. │Техническое перевооружение│       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │     и реконструкция      │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.1.│   Энергосбережение и     │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │ повышение энергетической │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │      эффективности       │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1  │Объект 1                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2  │Объект 2                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│... │                          │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.2.│     Создание систем      │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │    противоаварийной и    │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │    режимной автоматики   │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1  │Объект 1                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2  │Объект 2                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│... │                          │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.3.│     Создание систем      │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │   телемеханики и связи   │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1  │Объект 1                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2  │Объект 2                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│... │                          │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.4.│   Установка устройств    │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │ регулирования напряжения │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │ и компенсации реактивной │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │         мощности         │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1  │Объект 1                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2  │Объект 2                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│... │                          │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2. │   Новое строительство    │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.1.│    Энергосбережение и    │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │ повышение энергетической │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │      эффективности       │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1  │Объект 1                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2  │Объект 2                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│... │                          │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.2.│       Прочее новое       │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │      строительство       │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1  │Объект 1                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │в том числе ПТП           │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2  │Объект 2                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │в том числе ПТП           │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│... │                          │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┴──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│           Справочно:          │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┬──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │   Оплата процентов за    │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │  привлеченные кредитные  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
│    │         ресурсы          │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1  │Объект 1                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2  │Объект 2                  │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
├────┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│... │                          │       │         │      │       │       │       │      │      │     │     │     │      │      │      │      │
└────┴──────────────────────────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

--------------------------------
<1> С - строительство, П - проектирование.
<2> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<3> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<4> В прогнозных ценах соответствующего года.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение N 1.2
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. N 114

               Стоимость основных этапов работ по реализации
                инвестиционной программы компании на год N

                                                                 Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                   "__" _________ 20__ года
                                                                       М.П.

┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N N │  Наименование объекта  │                   Технические характеристики реконструируемых объектов                    │     Плановый объем     │                        Технические характеристики созданных объектов                      │
│    │          <1>           ├───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┤     финансирования,    ├───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┤
│    │                        │   генерирующие объекты    │        подстанции         │     линии электропередачи    │иные│      млн. руб. <2>     │   генерирующие объекты    │        подстанции         │     линии электропередачи    │иные│
│    │                        ├──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬────┬────┬──────┤объ-├─────┬───┬───┬─────┬────┼──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬────┬────┬──────┤объ-│
│    │                        │год   │норма-│мощ-  │тепло-│год   │норма-│коли- │мощ-  │год   │норма-│тип │мар-│про-  │екты│всего│ПИР│СМР│обо- │про-│год   │норма-│мощ-  │тепло-│год   │норма-│коли- │мощ-  │год   │норма-│тип │мар-│про-  │екты│
│    │                        │ввода │тив-  │ность,│вая   │ввода │тив-  │чество│ность,│ввода │тив-  │опор│ка  │тяжен-│    │     │   │   │рудо-│чие │ввода │тив-  │ность,│вая   │ввода │тив-  │чество│ность,│ввода │тив-  │опор│ка  │тяжен-│    │
│    │                        │в экс-│ный   │МВт   │энер- │в экс-│ный   │и мар-│МВА   │в экс-│ный   │    │ка- │ность,│    │     │   │   │вание│    │в экс-│ный   │МВт   │энер- │в экс-│ный   │и мар-│МВА   │в экс-│ный   │    │ка- │ность,│    │
│    │                        │плуа- │срок  │      │гия,  │плуа- │срок  │ка си-│      │плуа- │срок  │    │беля│км    │    │     │   │   │и ма-│    │плуа- │срок  │      │гия,  │плуа- │срок  │ка си-│      │плуа- │срок  │    │беля│км    │    │
│    │                        │тацию │служ- │      │Гкал/ │тацию │служ- │ловых │      │тацию │служ- │    │    │      │    │     │   │   │тери-│    │тацию │служ- │      │Гкал/ │тацию │служ- │ловых │      │тацию │служ- │    │    │      │    │
│    │                        │      │бы,   │      │час   │      │бы,   │транс-│      │      │бы,   │    │    │      │    │     │   │   │алы  │    │      │бы,   │      │час   │      │бы,   │транс-│      │      │бы,   │    │    │      │    │
│    │                        │      │лет   │      │      │      │лет   │форма-│      │      │лет   │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │лет   │      │      │      │лет   │форма-│      │      │лет   │    │    │      │    │
│    │                        │      │      │      │      │      │      │торов,│      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │торов,│      │      │      │    │    │      │    │
│    │                        │      │      │      │      │      │      │шт.   │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │шт.   │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│    │         ВСЕГО          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 1. │       Техническое      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │    перевооружение и    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │      реконструкция     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│1.1.│  Энергосбережение и    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │повышение энергетической│      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │     эффективности      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 1  │Объект 1                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 2  │Объект 2                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│... │                        │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│1.2.│    Создание систем     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │   противоаварийной и   │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │   режимной автоматики  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 1  │Объект 1                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 2  │Объект 2                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│... │                        │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│1.3.│    Создание систем     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │  телемеханики и связи  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 1  │Объект 1                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 2  │Объект 2                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│... │                        │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│1.4.│  Установка устройств   │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │регулирования напряжения│      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │и компенсации реактивной│      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │        мощности        │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 1  │Объект 1                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 2  │Объект 2                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│... │                        │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 2. │   Новое строительство  │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│2.1.│   Энергосбережение и   │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │повышение энергетической│      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │     эффективности      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 1  │Объект 1                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 2  │Объект 2                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│... │                        │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│2.2.│      Прочее новое      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │     строительство      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 1  │Объект 1                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│    │в том числе ПТП         │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 2  │Объект 2                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│    │в том числе ПТП         │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│... │                        │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┴────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│        Справочно:           │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┬────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│    │  Оплата процентов за   │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │ привлеченные кредитные │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
│    │        ресурсы         │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 1  │Объект 1                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│ 2  │Объект 2                │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
├────┼────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┤
│... │                        │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │     │   │   │     │    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │    │    │      │    │
└────┴────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴───┴───┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴────┘

--------------------------------
<1> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<2> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

Приложение N 1.3
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. N 114

                                                                 Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                   "__" _________ 20__ года
                                                                       М.П.

                       Прогноз ввода/вывода объектов

Наименование инвестиционного проекта ____________

N  
п/п 	Наименование проекта	Ввод мощностей    	Вывод мощностей     	
		МВт, Гкал/час, км,  
МВА         	МВт, Гкал/час, км, МВА  	
		N  	N + 1 	N + 2  	N    	N + 1 	N + 2  	
1  	2          	3  	4   	5    	6    	7   	8    	

Приложение N 1.4
к Приказу Минэнерго России
от "__" ____ 2010 г. N ___

                            Рекомендуемая форма
         представления предложений о внесении изменений в перечень
         инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной
                       программы, млн. рублей с НДС

                                                                 Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                   "__" _________ 20__ года
                                                                       М.П.

┌─────┬─────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────┬──────────────┬───────┐
│ N N │ Наименование объекта│ Остаток │                           Объем финансирования                           │Осталось  │    Объем корректировки <4>     │ Объем ввода  │Причины│
│     │                     │стоимости│                                                                          │профинан- │                                │  мощностей   │коррек-│
│     │                     │на начало├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤сировать  ├──────┬──┬──────────────────────┼──────────────┤тировки│
│     │                     │  года   │     всего    │     I кв.    │    II кв.    │   III кв.    │    IV кв.    │по резуль-│ млн. │% │  в том числе за счет │МВт, Гкал/час,│       │
│     │                     │   <2>   │              │              │              │              │              │татам от- │рублей│  │                      │   км, МВА    │       │
│     │                     │         ├────┬─────────┼────┬─────────┼────┬─────────┼────┬─────────┼────┬─────────┤четного   │      │  ├──────────┬───────────┼────┬─────────┤       │
│     │                     │         │план│скоррек- │план│скоррек- │план│скоррек- │план│скоррек- │план│скоррек- │периода   │      │  │уточнения │уточнения  │план│скоррек- │       │
│     │                     │         │ <3>│тирован- │    │тирован- │    │тирован- │    │тирован- │    │тирован- │<2>       │      │  │стоимости │стоимости  │ <3>│тирован- │       │
│     │                     │         │    │ный объем│    │ный объем│    │ный объем│    │ный объем│    │ный объем│          │      │  │по резуль-│по резуль- │    │ный объем│       │
│     │                     │         │    │<4>      │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │татам ут- │татам заку-│    │         │       │
│     │                     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │вержденной│почных про-│    │         │       │
│     │                     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │ПСД       │цедур      │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│     │        ВСЕГО        │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│ 1.  │     Техническое     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │    перевооружение   │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │   и реконструкция   │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│1.1. │   Энергосбережение  │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │     и повышение     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │    энергетической   │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │    эффективности    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  1  │Объект 1             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  2  │Объект 2             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│ ... │                     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│1.2. │   Создание систем   │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │   противоаварийной  │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │и режимной автоматики│         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  1  │Объект 1             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  2  │Объект 2             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│ ... │                     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│1.3. │   Создание систем   │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │ телемеханики и связи│         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  1  │Объект 1             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  2  │Объект 2             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│ ... │                     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│1.4. │ Установка устройств │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │    регулирования    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │     напряжения и    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │     компенсации     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │ реактивной мощности │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  1  │Объект 1             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  2  │Объект 2             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│ ... │                     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│ 2.  │ Новое строительство │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│2.1. │   Энергосбережение  │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │     и повышение     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │    энергетической   │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │    эффективности    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  1  │Объект 1             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  2  │Объект 2             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│ ... │                     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│2.2. │     Прочее новое    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │    строительство    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  1  │Объект 1             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│     │в том числе ПТП      │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  2  │Объект 2             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│     │в том числе ПТП      │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│ ... │                     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┴─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│         Справочно:        │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┬─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│     │   Оплата процентов  │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │   за привлеченные   │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
│     │  кредитные ресурсы  │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  1  │Объект 1             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│  2  │Объект 2             │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──┼──────────┼───────────┼────┼─────────┼───────┤
│ ... │                     │         │    │         │    │         │    │         │    │         │    │         │          │      │  │          │           │    │         │       │
└─────┴─────────────────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴──────────┴──────┴──┴──────────┴───────────┴────┴─────────┴───────┘

--------------------------------
<1> Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.
<2> В ценах отчетного года.
<3> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<4> Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение N 2.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" ___ 2010 года N __

Краткое описание инвестиционной программы

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
"__" ______ 20__ года
М.П.

Пояснительная записка должна включать в себя следующую информацию:
I. Общая характеристика инвестиционной программы:
Основные цели и направления инвестиционной программы, вводы мощностей, объемы финансирования, динамика изменения
II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением N 2.2).
III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 года N 35 и Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977).

Приложение N 2.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                 Краткое описание инвестиционной программы

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                      "__" ______ 20__ года
                                                                       М.П.

N 
п/п	Наиме-  
нование 
направ- 
ления/  
проекта 
инвести-
ционной 
прог-   
раммы   	Субъект    
Российской 
Федерации, 
на терри-  
тории ко-  
торого реа-
лизуется   
инвестици- 
онный про- 
ект        	Место  
распо- 
ложения
объекта	Технические   
характеристики  	Исполь-
зуемое 
топливо	Сроки     
реализации  
проекта    	Наличие исходно-разрешительной  
документации           	Про- 
цент 
осво-
ения 
смет-
ной  
стои-
мости
на   
01.  
01.  
года 
N, % 	Техническая
готовность
объекта на
01.01.2011,
% <2>   	Стоимость   
объекта,    
млн. рублей  	Остаточная   
стоимость объекта
на 01.01. года N,
млн. рублей   	Обоснование необходимости
реализации проекта   	Показатели     
экономической    
эффективности    
реализации     
инвестиционного   
проекта <4>     	
										в соот- 
ветст-  
вии с   
проект- 
но-смет-
ной до- 
кумента-
цией    
<3>     	в соот-
ветст- 
вии с  
итогами
конкур-
сов и  
заклю- 
ченными
догово-
рами   	в соот- 
ветст-  
вии с   
проект- 
но-смет-
ной до- 
кумента-
цией    
<3>     	в соот- 
ветст-  
вии с   
итогами 
конкур- 
сов и   
заклю-  
ченными 
догово- 
рами    	решае-
мые   
задачи
<1>   	режим- 
но-ба- 
лансо- 
вая не-
обходи-
мость  	основание 
включения 
инвести-  
ционного  
проекта   
в инвести-
ционную   
программу 
(решение  
Правитель-
ства Рос- 
сийской   
Федерации,
федераль- 
ные, реги-
ональные и
муници-   
пальные   	доходность	срок    
окупаемости	
				мощ-  
ность,
МВт,  
МВА   	выра-
бот- 
ка,  
млн. 
кВт/ч	длина
ВЛ, 
км 		год    
начала 
строи- 
тельст-
ва     	год   
ввода 
в экс-
плуа- 
тацию 	утверж-  
денная   
проектно-
сметная  
докумен- 
тация    
(+; -)   	заклю- 
чение  
Глав-  
гос-   
экспер-
тизы   
России 
(+; -) 	оформлен-
ный в со-
ответст- 
вии с за-
конода-  
тельством
землеот- 
вод      
(+; -)   	разре-
шение 
на    
строи-
тель- 
ство  
(+; -)										NPV, 
млн. 
рублей	IRR,
% 	прос-
той  	дис- 
кон- 
тиро-
ван- 
ный  	

																											

--------------------------------
<1> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<2> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<3> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<4> Приложить финансовую модель по проекту (приложение N 2.3).

Приложение N 2.3
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

           Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                     "__" _______ 20__ года
                                                                       М.П.

        Исходные данные       Значение
┌────────────────────────────┬─────────┐
│Общая стоимость объекта,    │         │
│руб. без НДС                │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Прочие расходы, руб. без НДС│         │
│на объект                   │         │  Собственный капитал
├────────────────────────────┼─────────┤  ┌─────────────────┬─────────────┐
│Срок амортизации, лет       │         │  │ Простой период  │             │
├────────────────────────────┼─────────┤  │ окупаемости, лет│             │
│Кол-во объектов, ед.        │         │  ├─────────────────┼─────────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤  │Дисконтированный │             │
│Затраты на ремонт объекта,  │         │  │     период      │             │
│руб. без НДС                │         │  │окупаемости, лет │             │
├────────────────────────────┼─────────┤  ├─────────────────┼─────────────┤
│Первый ремонт объекта, лет  │         │  │    NPV через    │             │
│после постройки             │         │  │  10 лет, руб.   │             │
├────────────────────────────┼─────────┤  ├─────────────────┼─────────────┤
│Периодичность ремонта       │         │  │Целесообразность │             │
│объекта, лет                │         │  │   реализации    │             │
├────────────────────────────┼─────────┤  │     проекта     │             │
│Прочие расходы при          │         │  └─────────────────┴─────────────┘
│эксплуатации объекта, руб.  │         │
│без НДС                     │         │
├────────────────────────────┼─────────┤        График (не приводится)
│Возникновение прочих        │         │
│расходов, лет после         │         │
│постройки                   │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Периодичность расходов, лет │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│                            │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Налог на прибыль            │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│                            │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Прочие расходы, руб. без НДС│         │
│в месяц                     │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Рабочий капитал в % от      │         │
│выручки                     │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Срок кредита                │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ставка по кредиту           │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ставка по кредиту без учета │         │
│субсидирования              │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Доля заемных средств        │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ставка дисконтирования на   │         │
│собственный капитал         │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Доля собственных средств    │         │
├────────────────────────────┼─────────┤
│WACC                        │         │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┬───────┬─────┬───────────┐
│Период                      │    N    │ N + 1  │ N + 2 │ ... │год        │
│                            │         │        │       │     │окончания  │
│                            │         │        │       │     │строи-     │
│                            │         │        │       │     │тельства   │
│                            │         │        │       │     │объекта    │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────────┤
│Прогноз инфляции            │         │        │       │     │           │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────────┤
│Кумулятивная инфляция       │         │        │       │     │           │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────────┤
│Доход, руб. без НДС         │         │        │       │     │           │
└────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴─────┴───────────┘

Кредит, руб.                	N    	N + 1  	N + 2 	... 	год        
окончания  
строи-     
тельства   
объекта    	
Основной долг на начало     
периода                     						
Поступление кредита         						
Погашение основного долга   						
Начисление процентов        						

БДР, руб.                   	N    	N + 1  	N + 2 	... 	год        
окончания  
строи-     
тельства   
объекта    	
Доход                       						
Операционные расходы        						
Ремонт объекта              						
Прочие расходы при          
эксплуатации объекта, руб.  
без НДС                     						

						
Налог на имущество (После   
ввода объекта в             
эксплуатацию)               						
EBITDA                      						
Амортизация                 						
EBIT                        						
Проценты                    						
Прибыль до налогообложения  						
Налог на прибыль            						
Чистая прибыль              						

Денежный поток на           
собственный капитал, руб.   	N    	N + 1  	N + 2 	... 	год        
окончания  
строи-     
тельства   
объекта    	
EBIT                        						
Амортизация                 						
Проценты                    						
Налог на прибыль            						
НДС                         						
Изменения в рабочем капитале						
Инвестиции                  						
Изменения финансовых        
обязательств                						
Чистый денежный поток       						
Накопленный ЧДП             						
Коэффициент дисконтирования 						
PV                          						
NPV (без учета продажи)     						
IRR                         						
PP                          						
DPP                         						

--------------------------------
<1> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

Приложение N 3.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                   Укрупненный сетевой график выполнения
                          инвестиционного проекта

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                     "__" _______ 20__ года
                                                                       М.П.

Наименование инвестиционного проекта ____________________

по состоянию на _______ 20__ г.

N  	Наименование  
контрольных   
этапов     
реализации   
инвестпроекта  
с указанием   
событий/работ  
критического  
пути сетевого  
графика <1>   	Выполнение (план)  	Процент   
исполнения  
работ за весь
период (%)  	Основные    
причины     
невыполнения  	
		начало 
(дата) 	окончание 
(дата)   			
1  	2        	3    	4     	5      	6        	
1  						
2  						
3  						

--------------------------------
<1> Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение N 3.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для генерирующих компаний

N   
п/п  	Наименование                   	Тип      	
1   	Предпроектный этап                                                	
1.1. 	Выбор площадки строительства                      	событие    	
1.2. 	Проведение инженерных изысканий на выбранной      
площадке строительства                            	работа     	
2   	Проектный этап                                                    	
2.1. 	Заключение договора на разработку ТЭО             	событие    	
2.2. 	Заключение договора на разработку рабочего проекта	работа     	
2.3. 	Разработка и утверждение ТЭО                      	событие    	
2.4. 	Разработка рабочего проекта                       	работа     	
2.5. 	Получение положительного заключения               
государственной экспертизы на ТЭО                 	событие    	
2.6. 	Получение разрешения на строительство             	событие    	
3   	Организационный этап                                              	
3.1. 	Заключение договора с генеральным подрядчиком     
(ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками	событие    	
3.2. 	Получение правоустанавливающих документов на      
земельный участок под строительство               	событие    	
3.3. 	Заключение договоров на поставщику основного      
оборудования                                      	событие    	
3.3.1.	График поставки основного оборудования на объект  	событие    	
4   	Строительные работы                                               	
4.1. 	Подготовка площадки строительства                 	работа     	
4.2. 	Строительство основных сооружений (главного       
корпуса, гидротехнических сооружений, объектов    
топливного хозяйства, технического водоснабжения и
др.)                                              	работа     	
4.3. 	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования 	событие    	
4.4. 	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов  
для монтажа основного оборудования                	событие    	
4.5. 	Монтаж основного оборудования и трубопроводов     	работа     	
4.6. 	Монтаж электротехнического оборудования и КиП     	работа     	
5   	Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)       	
5.1. 	Заявка в сетевую компанию на технологическое      
присоединение                                     	событие    	
5.2. 	Заключение договора с сетевой компанией на ТП.    
Получение и согласование ТУ и ТП                  	событие    	
5.3. 	Разработка и согласование предпроектной           
внестадийной работы "Схема выдачи мощности"       	работа     	
5.4. 	Заключение договора на реализацию схемы выдачи    
мощности с согласованием графика строительства    	событие    	
5.5. 	Разработка рабочей документацией сетевого         
строительства ГК (если таковое требуется для      
реализации СВМ)                                   	работа     	
5.6. 	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое
требуется для реализации СВМ)                     	работа     	
6   	Испытания и ввод в эксплуатацию                                   	
6.1. 	Индивидуальные испытания оборудования и           
функциональные испытания отдельных систем         	работа     	
6.2. 	Комплексное опробование оборудования              	работа     	
6.3. 	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для            
технологического присоединения к электрическим    
сетям                                             	событие    	
6.4. 	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта  
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию      
законченного строительством объекта)              	событие    	

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний

N   
п/п  	Наименование                   	Тип      	
1   	Предпроектный и проектный этап                                    	
1.1. 	Получение заявки на ТП                            	событие    	
1.2. 	Разработка и выдача ТУ на ТП                      	событие    	
1.3. 	Заключение договора на разработку проектной       
документации                                      	событие    	
1.4. 	Получение положительного заключения               
государственной экспертизы на проектную           
документацию                                      	событие    	
1.5. 	Утверждение проектной документации                	событие    	
1.6. 	Разработка рабочей документации                   	работа     	
2   	Организационный этап                                              	
2.1. 	Заключение договора подряда (допсоглашения к      
договору)                                         	событие    	
2.2. 	Получение правоустанавливающих документов для     
выделения земельного участка под строительство    	событие    	
2.3. 	Получение разрешительной документации для         
реализации СВМ                                    	событие    	
3   	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы    	
3.1. 	Подготовка площадки строительства для подстанций, 
трассы - для ЛЭП                                  	работа     	
3.2. 	Поставка основного оборудования                   	событие    	
3.3. 	Монтаж основного оборудования                     	работа     	
3.4. 	Пусконаладочные работы                            	работа     	
3.5. 	Завершение строительства                          	событие    	
4   	Испытания и ввод в эксплуатацию                                   	
4.1. 	Комплексное опробование оборудования              	работа     	
4.2. 	Оформление (подписание) актов об осуществлении    
технологического присоединения к электрическим    
сетям                                             	событие    	
4.3. 	Получение разрешения на ввод объекта в            
эксплуатацию                                      	событие    	
4.4. 	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие    	

Приложение N 4.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                              Финансовый план
               на период реализации инвестиционной программы

                      (заполняется по финансированию)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                     "__" _______ 20__ года
                                                                       М.П.

                                                                млн. рублей
┌─────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬────────┐
│  N  │                Показатели                 │Год N │  Год  │  Год   │
│ п/п │                                           │      │ N + 1 │ N + 2  │
│     │                                           ├──────┼───────┼────────┤
│     │                                           │всего │ всего │ всего  │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│  1  │                     2                     │  3   │   4   │   5    │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ I.  │Выручка от реализации товаров (работ,      │      │       │        │
│     │услуг), всего                              │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │в том числе:                               │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.1. │Выручка от основной деятельности           │      │       │        │
│     │(расшифровать по видам регулируемой        │      │       │        │
│     │деятельности)                              │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.2. │Выручка от прочей деятельности             │      │       │        │
│     │(расшифровать)                             │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ II. │Расходы по текущей деятельности, всего     │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1.  │Материальные расходы, всего                │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │в том числе:                               │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.1. │Топливо                                    │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.2. │Сырье, материалы, запасные части,          │      │       │        │
│     │инструменты                                │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.3. │Покупная электроэнергия                    │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2.  │Расходы на оплату труда с учетом ЕСН       │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 3.  │Амортизационные отчисления                 │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 4.  │Налоги и сборы, всего                      │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 5.  │Прочие расходы, всего                      │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │в том числе:                               │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│5.1. │Ремонт основных средств                    │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│5.3. │Платежи по аренде и лизингу                │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│5.4. │Инфраструктурные платежи рынка             │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│III. │Валовая прибыль (I р. - II р.)             │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ IV. │Внереализационные доходы и расходы (сальдо)│      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1.  │Внереализационные доходы, всего            │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │в том числе                                │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.1. │Доходы от участия в других организациях    │      │       │        │
│     │(дивиденды от ДЗО)                         │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.2. │Проценты от размещения средств             │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2.  │Внереализационные расходы, всего           │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │в том числе                                │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов          │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ V.  │Прибыль до налогообложения (III + IV)      │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ VI. │Налог на прибыль                           │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│VII. │Чистая прибыль                             │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│VIII.│Направления использования чистой прибыли   │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │в том числе:                               │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1.  │Фонд накопления                            │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2.  │Резервный фонд                             │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 3.  │Выплата дивидендов                         │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 4.  │Прочие расходы из прибыли                  │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ IX. │Изменение дебиторской задолженности        │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1.  │Увеличение дебиторской задолженности       │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2.  │Сокращение дебиторской задолженности       │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │Сальдо (+ увеличение; - сокращение)        │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ X.  │Изменение кредиторской задолженности       │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1.  │Увеличение кредиторской задолженности      │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2.  │Сокращение кредиторской задолженности      │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │Сальдо (+ увеличение; - сокращение)        │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ XI. │Привлечение заемных средств                │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │в том числе на:                            │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1.  │Финансирование инвестиционной программы    │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.1. │в т.ч. в части ДПМ <1>                     │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2.  │Прочие цели (расшифровка)                  │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│XII. │Погашение заемных средств                  │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │в том числе по:                            │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1.  │Инвестиционной программе                   │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.1. │в т.ч. в части ДПМ <1>                     │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2.  │Прочие цели (расшифровка)                  │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│XIII.│Возмещаемый НДС (поступления)              │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│XIV. │Купля/продажа активов                      │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1.  │Покупка активов (акций, долей и т.п.)      │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2.  │Продажа активов (акций, долей и т.п.)      │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ XV. │Средства, полученные от допэмиссии акций   │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│XVI. │Капитальные вложения                       │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │в т.ч. в части ДПМ <1>                     │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│XVI. │Всего поступления                          │      │       │        │
│     │(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р.│      │       │        │
│     │+ XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)   │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│XVII.│Всего расходы                              │      │       │        │
│     │(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX │      │       │        │
│     │р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. +│      │       │        │
│     │1 п. XIV р. + XVI р.)                      │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│     │Сальдо (+ профицит; - дефицит)             │      │       │        │
│     │(XVI р. - XVII р.)                         │      │       │        │
├─────┴───────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┤
│                                                                         │
├─────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬────────┤
│     │Справочно:                                 │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1.  │EBITDA                                     │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2.  │Долг на конец периода                      │      │       │        │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 3.  │Прогноз тарифов                            │      │       │        │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┘

--------------------------------
<1> Заполняется ОГК/ТГК.

Приложение N 4.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" ____ 2010 г. N ___

             Источники финансирования инвестиционных программ
          (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                   "__" _________ 20__ года
                                                                       М.П.

N N   	Источник финансирования   	План <1> 
года N  	План <1>
года N +
1    	План <1> 
года N + 
2 <2>  	Итого	
1.   	Собственные средства        					
1.1.   	Прибыль, направляемая на    
инвестиции:                 					
1.1.1.  	в т.ч. инвестиционная       
составляющая в тарифе       					
1.1.2.  	в т.ч. прибыль со свободного
сектора                     					
1.1.3.  	в т.ч. от технологического  
присоединения (для          
электросетевых компаний)    					
1.1.3.1. 	в т.ч. от технологического  
присоединения генерации     					
1.1.3.2. 	в т.ч. от технологического  
присоединения потребителей  					
1.1.4.  	Прочая прибыль              					
1.2.   	Амортизация                 					
1.2.1.  	Амортизация, учтенная       
в тарифе                    					
1.2.2.  	Прочая амортизация          					
1.2.3.  	Недоиспользованная          
амортизация прошлых лет     					
1.3.   	Возврат НДС                 					
1.4.   	Прочие собственные средства 					
1.4.1.  	в т.ч. средства допэмиссии  					
1.5.   	Остаток собственных средств 
на начало года              					
2.    	Привлеченные средства,      
в т.ч.:                     					
2.1.   	Кредиты                     					
2.2.   	Облигационные займы         					
2.3.   	Займы организаций           					
2.4.   	Бюджетное финансирование    					
2.5.   	Средства внешних инвесторов 					
2.6.   	Использование лизинга       					
2.7.   	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников            
финансирования              					
	для ОГК/ТГК, в том числе    					
	ДПМ					
	вне ДПМ					

--------------------------------
<1> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<2> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

Приложение N 4.3
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                             Финансовая модель
               (в разрезе каждого юридического лица группы/
                 по конечным видам выпускаемой продукции)
                    по годам до 2020 года включительно

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                      "__" ______ 20__ года
                                                                       М.П.

┌──────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬─────────┐
│                          │   N    │N + 1 │N + 2 │ ... │ 2020  │  Итого  │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Выручка                   │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 1               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 2               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 3               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Обслуживание            │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Прочее                  │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Себестоимость             │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│ Прямая себестоимость     │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 1               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 2               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 3               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Обслуживание            │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Прочее                  │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│ Накладные расходы        │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Операционная прибыль      │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Внереализационные расходы │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Проценты                  │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Налог на прибыль          │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Чистая прибыль/убыток     │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Чистая прибыль с учетом   │        │      │      │     │       │         │
│субсидий по процентам     │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│                          │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Операционный денежный     │        │      │      │     │       │         │
│поток                     │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Поступления               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 1               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 2               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 3               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Обслуживание            │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Прочее                  │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Выбытия                   │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Платежи по прямой         │        │      │      │     │       │         │
│себестоимости             │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 1               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 2               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Продукт 3               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Обслуживание            │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Прочее                  │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│ Заводские расходы        │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│ Процентные платежи       │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Итого операционный        │        │      │      │     │       │         │
│денежный поток            │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Инвестиционный денежный   │        │      │      │     │       │         │
│поток                     │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Поступления               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Выбытия                   │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Итого инвестиционный      │        │      │      │     │       │         │
│денежный поток            │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Финансовый денежный поток │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Поступления               │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│ Эмиссия акций            │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│ Привлечение кредитов     │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Выбытия                   │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│ Погашение кредитов и     │        │      │      │     │       │         │
│займов                    │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Итого финансовый денежный │        │      │      │     │       │         │
│поток                     │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Итого денежный поток      │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Меры господдержки         │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Реструктуризация        │        │      │      │     │       │         │
│дефицитных кредитов       │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Увеличение капитализации│        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Субсидирование          │        │      │      │     │       │         │
│процентной ставки (реестр)│        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  Субсидирование          │        │      │      │     │       │         │
│процентной ставки         │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Итого денежный поток      │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Нарастающим итогом        │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│  остаток денежных средств│        │      │      │     │       │         │
│на начало периода         │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Кредиты на начало         │        │      │      │     │       │         │
├──────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┤
│Кредиты на конец          │        │      │      │     │       │         │
└──────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────────┘

Приложение N 5
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
                      об исполнении финансового плана

                      (заполняется по финансированию)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                      "__" ______ 20__ года
                                                                       М.П.

                                                                млн. рублей
┌──────┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│  N   │             Показатели             │  Год N - 2   │  Год N - 1   │
│ п/п  │                                    ├──────┬───────┼──────┬───────┤
│      │                                    │ план │ факт  │ план │ факт  │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  1   │                 2                  │  3   │   4   │  5   │   6   │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  I.  │Выручка от реализации товаров       │      │       │      │       │
│      │(работ, услуг), всего               │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │в том числе:                        │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.1. │Выручка от основной деятельности    │      │       │      │       │
│      │(расшифровать по видам регулируемой │      │       │      │       │
│      │деятельности)                       │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.2. │Выручка от прочей деятельности      │      │       │      │       │
│      │(расшифровать)                      │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ II.  │Расходы по текущей деятельности,    │      │       │      │       │
│      │всего                               │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  1.  │Материальные расходы, всего         │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │в том числе:                        │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.1. │Топливо                             │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.2. │Сырье, материалы, запасные части,   │      │       │      │       │
│      │инструменты                         │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.3. │Покупная электроэнергия             │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  2.  │Расходы на оплату труда с учетом    │      │       │      │       │
│      │ЕСН                                 │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  3.  │Амортизационные отчисления          │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  4.  │Налоги и сборы, всего               │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  5.  │Прочие расходы, всего               │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │в том числе:                        │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 5.1. │Ремонт основных средств             │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│ 5.3. │Платежи по аренде и лизингу         │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 5.4. │Инфраструктурные платежи рынка      │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ III. │Валовая прибыль (I р. - II р.)      │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ IV.  │Внереализационные доходы и расходы  │      │       │      │       │
│      │(сальдо)                            │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  1.  │Внереализационные доходы, всего     │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │в том числе                         │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.1. │Доходы от участия в других          │      │       │      │       │
│      │организациях (дивиденды от ДЗО)     │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.2. │Проценты от размещения средств      │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  2.  │Внереализационные расходы, всего    │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │в том числе                         │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов   │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  V.  │Прибыль до налогообложения (III +   │      │       │      │       │
│      │IV)                                 │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ VI.  │Налог на прибыль                    │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ VII. │Чистая прибыль                      │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ VIII.│Направления использования чистой    │      │       │      │       │
│      │прибыли                             │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │в том числе:                        │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  1.  │Фонд накопления                     │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  2.  │Резервный фонд                      │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  3.  │Выплата дивидендов                  │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  4.  │Прочие расходы из прибыли           │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ IX.  │Изменение дебиторской задолженности │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  1.  │Увеличение дебиторской              │      │       │      │       │
│      │задолженности                       │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  2.  │Сокращение дебиторской              │      │       │      │       │
│      │задолженности                       │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  X.  │Изменение кредиторской              │      │       │      │       │
│      │задолженности                       │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  1.  │Увеличение кредиторской             │      │       │      │       │
│      │задолженности                       │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  2   │Сокращение кредиторской             │      │       │      │       │
│      │задолженности                       │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ XI.  │Привлечение заемных средств         │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │в том числе на:                     │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  1.  │Финансирование инвестиционной       │      │       │      │       │
│      │программы                           │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.1. │в т.ч. в части ДПМ <1>              │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  2.  │Прочие цели (расшифровка)           │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ XII. │Погашение заемных средств           │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │в том числе по:                     │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  1.  │Инвестиционной программе            │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.1. │в т.ч. в части ДПМ <1>              │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  2.  │Прочие цели (расшифровка)           │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│XIII. │Возмещаемый НДС (поступления)       │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ XIV. │Купля/продажа активов               │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  1.  │Покупка активов (акций, долей и     │      │       │      │       │
│      │т.п.)                               │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  2.  │Продажа активов (акций, долей и     │      │       │      │       │
│      │т.п.)                               │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ XV.  │Средства, полученные от допэмиссии  │      │       │      │       │
│      │акций                               │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ XVI. │Капитальные вложения                │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │в т.ч. в части ДПМ <1>              │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│ XVI. │Всего поступления                   │      │       │      │       │
│      │(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 │      │       │      │       │
│      │п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п.    │      │       │      │       │
│      │XIV р. + XV р.)                     │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│XVII. │Всего расходы                       │      │       │      │       │
│      │(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. +  │      │       │      │       │
│      │1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. +    │      │       │      │       │
│      │VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI │      │       │      │       │
│      │р.)                                 │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│      │Сальдо (+ профицит; - дефицит)      │      │       │      │       │
│      │(XVI р. - XVII р.)                  │      │       │      │       │
├──────┴────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┤
│                                                                         │
├──────┬────────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┤
│      │Справочно:                          │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  1.  │EBITDA                              │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  2.  │Долг на конец периода               │      │       │      │       │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│  3.  │Уровень тарифов                     │      │       │      │       │
└──────┴────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

--------------------------------
<1> Заполняется ОГК/ТГК.

Приложение N 6.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
         об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

                         (представляется ежегодно)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                      "__" ______ 20__ года
                                                                       М.П.

N N	Наименование  
объекта     	Остаток
стои-  
мости  
на     
начало 
года   
<1>    	Объем    
финанси- 
рования  
[отчетный
год]     	Освоено 
(закрыто
актами  
выпол-  
ненных  
работ), 
млн.    
рублей  	Введено   
(оформлено
актами    
ввода в   
эксплуа-  
тацию),   
млн.      
рублей    	Осталось   
профинан-  
сировать по
результатам
отчетного  
периода <1>	Отклонение <3>        	Причины  
отклонений	
							млн. 
рублей	%	в том числе за счет 		
									уточнения 
стоимости 
по        
результа- 
там утвер-
жденной   
ПСД       	уточнения 
стоимости 
по        
результа- 
там заку- 
почных    
процедур  		
			план
<2> 	факт
<3> 									
	ВСЕГО      												
1. 	Техническое   
перевооружение 
и         
реконструкция   												
1.1.	Энергосбережение
и повышение   
энергетической 
эффективности  												
1  	Объект 1        												
2  	Объект 2        												
... 													
1.2.	Создание систем 
противоаварийной
и режимной   
автоматики   												
1  	Объект 1        												
2  	Объект 2        												
... 													
1.3.	Создание систем 
телемеханики  
и связи     												
1  	Объект 1        												
2  	Объект 2        												
... 													
1.4.	Установка    
устройств    
регулирования  
напряжения   
и компенсации  
реактивной   
мощности    												
1  	Объект 1        												
2  	Объект 2        												
... 													
2. 	Новое      
строительство  												
2.1.	Энергосбережение
и повышение   
энергетической 
эффективности  												
1  	Объект 1        												
2  	Объект 2        												
... 													
2.2.	Прочее новое  
строительство 												
1  	Объект 1        												
	в том числе ПТП 												
2  	Объект 2        												
	в том числе ПТП 												
... 													
Справочно:     												
	Оплата процентов
за привлеченные 
кредитные    
ресурсы     												
1  	Объект 1        												
2  	Объект 2        												
... 													

--------------------------------
<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<3> Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение N 6.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
     об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

                         (представляется ежегодно)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                       "__" _____ 20__ года
                                                                       М.П.

N N  	Источник финансирования       	Объем      
финансирования 
[отчетный год] 	Причины 
отклонений	
		план  
<1>  	факт 
<2>  		
1.   	Собственные средства                 				
1.1.  	Прибыль, направляемая на инвестиции: 				
1.1.1. 	в т.ч. инвестиционная составляющая в 
тарифе                               				
1.1.2. 	в т.ч. прибыль со свободного сектора 				
1.1.3. 	в т.ч. от технологического           
присоединения (для электросетевых    
компаний)                            				
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического           
присоединения генерации              				
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического           
присоединения потребителей           				
1.1.4. 	Прочая прибыль                       				
1.2.  	Амортизация                          				
1.2.1. 	Амортизация, учтенная в тарифе       				
1.2.2. 	Прочая амортизация                   				
1.2.3. 	Недоиспользованная амортизация       
прошлых лет                          				
1.3.  	Возврат НДС                          				
1.4.  	Прочие собственные средства          				
1.4.1. 	в т.ч. средства допэмиссии           				
1.5.  	Остаток собственных средств на начало
года                                 				
2.   	Привлеченные средства, в т.ч.:       				
2.1.  	Кредиты                              				
2.2.  	Облигационные займы                  				
2.3.  	Займы организаций                    				
2.4.  	Бюджетное финансирование             				
2.5.  	Средства внешних инвесторов          				
2.6.  	Использование лизинга                				
2.7.  	Прочие привлеченные средства         				
	ВСЕГО источников финансирования      				
	для ОГК/ТГК, в том числе             				
	ДПМ				
	вне ДПМ				

--------------------------------
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
<2> Накопленным итогом за год.

Приложение N 6.3
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
                         о вводах/выводах объектов

                         (представляется ежегодно)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                       "__" _____ 20__ года
                                                                       М.П.

N 
п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей     	Вывод мощностей    	
		план <1>  	факт    	план <1>  	факт    	
		МВт,    
Гкал/час, 
км     	МВт,    
Гкал/час,  
км      	МВт,    
Гкал/час, 
км     	МВт,    
Гкал/час, 
км     	
1 	2          	3     	4      	5     	6     	

--------------------------------
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение N 7.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
         об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

                      (представляется ежеквартально)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                       "__" _____ 20__ года
                                                                       М.П.

N N 	Наименование объекта	Остаток 
стоимости
на начало
года   
<1>   	Объем финансирования                   
[отчетный год]                      	Освоено (зак-
рыто актами  
выполненных  
работ), млн. 
рублей       	Введено (офор-
млено актами  
ввода в экс-  
плуатацию),   
млн. рублей   	Осталось
профи-  
нансиро-
вать по 
резуль- 
татам   
отчетно-
го пери-
ода <1> 	Отклонение <3>         	Причины
откло- 
нений  	
			всего   	I кв.   	II кв.  	III кв.  	IV кв.  				млн. 
рублей	% 	в том числе за счет 		
			план
<2>	факт 
<3>  	план	факт 	план	факт 	план	факт 	план	факт 	всего	за от- 
четный 
квартал	всего	за от-  
четный  
квартал 				уточнения 
стоимости 
по резуль-
татам ут- 
вержденной
ПСД       	уточнения  
стоимости  
по резуль- 
татам заку-
почных про-
цедур      		
	ВСЕГО        																						
1.  	Техническое     
перевооружение   
и реконструкция   																						
1.1. 	Энергосбережение  
и повышение     
энергетической   
эффективности    																						
1  	Объект 1             																						
2  	Объект 2             																						
... 																							
1.2. 	Создание систем   
противоаварийной  
и режимной автоматики																						
1  	Объект 1             																						
2  	Объект 2             																						
... 																							
1.3. 	Создание систем   
телемеханики и связи																						
1  	Объект 1             																						
2  	Объект 2             																						
... 																							
1.4. 	Установка устройств 
регулирования    
напряжения и    
компенсации     
реактивной мощности 																						
1  	Объект 1             																						
2  	Объект 2             																						
... 																							
2.  	Новое строительство 																						
2.1. 	Энергосбережение  
и повышение     
энергетической   
эффективности    																						
1  	Объект 1             																						
2  	Объект 2             																						
... 																							
2.2. 	Прочее новое     
строительство    																						
1  	Объект 1             																						
	в том числе ПТП      																						
2  	Объект 2             																						
	в том числе ПТП      																						
... 																							
Справочно:        																						
	Оплата процентов  
за привлеченные   
кредитные ресурсы  																						
1  	Объект 1             																						
2  	Объект 2             																						
... 																							

--------------------------------
<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<3> Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение N 7.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
             об исполнении основных этапов работ по реализации
             инвестиционной программы компании в отчетном году

                      (представляется ежеквартально)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                       "__" _____ 20__ года
                                                                       М.П.

N N 	Наименование  
объекта    
<1>      	Плановый объем     
финансирования,     
млн. руб. <1>      	Фактически      
профинансировано,   
млн. руб.       	Отклонение фактической  
стоимости работ от плановой
стоимости, млн. руб.   	Фактически освоено (закрыто
актами выполненных работ),
млн. руб.         	Технические характеристики созданных объектов                      	
						генерирующие объекты   	подстанции         	линии электропередачи    	иные
объ-
екты	
	ВСЕГО      	все-
го  	ПИР	СМР	обору- 
дова-  
ние и  
мате-  
риалы  	про-
чие 	все-
го  	ПИР	СМР	обору-
дова- 
ние и 
мате- 
риалы 	про-
чие 	все-
го  	ПИР 	СМР 	обору- 
дова-  
ние и  
мате-  
риалы  	про-
чие 	все-
го  	ПИР 	СМР 	обору- 
дова-  
ние и  
мате-  
риалы  	про-
чие 	год   
ввода 
в экс-
плуа- 
тацию 	нор- 
ма-  
тив- 
ный  
срок 
служ-
бы,  
лет  	мощ-  
ность,
МВт   	теп- 
ло-  
вая  
энер-
гия, 
Гка/ 
час  	год    
ввода  
в экс- 
плуа-  
тацию  	нор- 
ма-  
тив- 
ный  
срок 
служ-
бы,  
лет  	коли- 
чест- 
во и  
марка 
сило- 
вых   
транс-
форма-
торов,
шт.   	мощ-  
ность,
МВА   	год   
ввода 
в экс-
плуа- 
тацию 	нор- 
ма-  
тив- 
ный  
срок 
служ-
бы,  
лет  	тип 
опор	мар-
ка  
ка- 
беля	про-  
тя-   
жен-  
ность,
км    		
1. 	Техническое  
перевооружение 
и реконструкция																																			
1.1. 	Энергосбережение
и повышение  
энергетической 
эффективности 																																			
1  	Объект 1        																																			
2  	Объект 2        																																			
... 																																				
1.2. 	Создание систем
противоаварийной
и режимной   
автоматики   																																			
1  	Объект 1        																																			
2  	Объект 2        																																			
... 																																				
1.3. 	Создание систем
телемеханики  
и связи    																																			
1  	Объект 1        																																			
2  	Объект 2        																																			
... 																																				
1.4. 	Установка   
устройств   
регулирования 
напряжения   
и компенсации 
реактивной   
мощности    																																			
1  	Объект 1        																																			
2  	Объект 2        																																			
... 																																				
2.  	Новое     
строительство 																																			
2.1. 	Энергосбережение
и повышение  
энергетической 
эффективности 																																			
1  	Объект 1        																																			
2  	Объект 2        																																			
... 																																				
2.2. 	Прочее новое  
строительство 																																			
1  	Объект 1        																																			
	в том числе ПТП 																																			
2  	Объект 2        																																			
	в том числе ПТП 																																			
... 																																				
Справочно:      																																			
	Оплата процентов
за привлеченные
кредитные   
ресурсы    																																			
1  	Объект 1        																																			
2  	Объект 2        																																			
... 																																				

--------------------------------
<1> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<2> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Приложение N 8
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
     об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

                      (представляется ежеквартально)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                       "__" _____ 20__ года
                                                                       М.П.

N N  	Источник     
финансирования  	Объем финансирования [отчетный год]         	Причины  
отклонений 	
		всего  	I кв.   	II кв.  	III кв. 	IV кв.  		
		план
<1> 	факт
<2> 	план 	факт	план	факт 	план	факт	план 	факт		
1.   	Собственные       
средства          												
1.1.  	Прибыль,          
направляемая      
на инвестиции:    												
1.1.1. 	в т.ч. инвестици- 
ционная составля- 
ющая в тарифе     												
1.1.2. 	в т.ч. прибыль    
со свободного     
сектора           												
1.1.3. 	в т.ч. от         
технологического  
присоединения (для
электросетевых    
компаний)         												
1.1.3.1.	в т.ч. от         
технологического  
присоединения     
генерации         												
1.1.3.2.	в т.ч. от         
технологического  
присоединения     
потребителей      												
1.1.4. 	Прочая прибыль    												
1.2.  	Амортизация       												
1.2.1. 	Амортизация,      
учтенная в тарифе 												
1.2.2. 	Прочая амортизация												
1.2.3. 	Недоиспользованная
амортизация       
прошлых лет       												
1.3.  	Возврат НДС       												
1.4.  	Прочие собственные
средства          												
1.4.1. 	в т.ч. средства   
допэмиссии        												
1.5.  	Остаток           
собственных       
средств на начало 
года              												
2.   	Привлеченные      
средства,         
в т.ч.:           												
2.1.  	Кредиты           												
2.2.  	Облигационные     
займы             												
2.3.  	Займы организаций 												
2.4.  	Бюджетное         
финансирование    												
2.5.  	Средства внешних  
инвесторов        												
2.6.  	Использование     
лизинга           												
2.7.  	Прочие            
привлеченные      
средства          												
	ВСЕГО             
источников        
финансирования    												
	для ОГК/ТГК, в    
том числе         												
	ДПМ   												
	вне ДПМ   												

--------------------------------
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
<2> Накопленным итогом за год.

Приложение N 9
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
                         о вводах/выводах объектов

                      (представляется ежеквартально)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                       "__" _____ 20__ года
                                                                       М.П.

N  
п/п 	Наименование
проекта   	Ввод мощностей                        	Вывод мощностей                         	
		план <1>           	факт              	план <1>            	факт              	
		МВт, Гкал/час, км, МВА    	МВт, Гкал/час, км, МВА     	МВт, Гкал/час, км, МВА     	МВт, Гкал/час, км, МВА     	
		I кв.	II  
кв. 	III 
кв. 	IV  
кв. 	2010 г.	I кв.	II  
кв. 	III 
кв. 	IV  
кв. 	2010 г.	I кв.	II  
кв. 	III 
кв. 	IV  
кв. 	2010 г.	I кв.	II  
кв. 	III  
кв.  	IV  
кв. 	2010 г.	
1  	2      	3  	4  	5  	6  	7   	8  	9  	10  	11  	12   	13  	14  	15  	16  	17   	18  	19  	20  	21  	22   	

--------------------------------
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение N 10
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
                        о ходе реализации проектов

             (заполняется для наиболее значимых проектов <1>)

                      (представляется ежеквартально)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------

                                                       "__" _____ 20__ года
                                                                       М.П.

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Наименование объекта                │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Местоположение объекта (субъект     │                                    │
│Российской Федерации, населенный    │                                    │
│пункт)                              │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Тип проекта                         │[модернизация/реконструкция/новое   │
│                                    │строительство/расширение]           │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Вводимая мощность (в том числе      │                                    │
│прирост)                            │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Срок ввода объекта                  │[срок, установленный инвестиционной │
│                                    │программой]                         │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Фактическая стадия реализации       │[проектирование/строительство/      │
│проекта на отчетную дату            │незавершенное строительство -       │
│                                    │приостановлено/законсервировано]    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Проектная документация              │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│1. Кем, когда принято решение о     │                                    │
│строительстве объекта (реквизиты    │                                    │
│документа)                          │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│2. Кем, когда разработана проектная │                                    │
│документация (разработана/не        │                                    │
│разработана (фактическое состояние),│                                    │
│наименование проектной организации, │                                    │
│утверждена/не утверждена, год       │                                    │
│утверждения, реквизиты документа)   │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│3. Прохождение проектной            │                                    │
│документацией государственной       │                                    │
│экспертизы, утверждение документации│                                    │
│(утверждена/не утверждена,          │                                    │
│наименование ведомства, проводящего │                                    │
│экспертизу, когда выдано заключение,│                                    │
│реквизиты документа <2>)            │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Землеотвод                          │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- наличие землеотвода (кем, когда   │                                    │
│утверждено, реквизиты документа)    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Исходно-разрешительная документация │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- наличие разрешения на             │                                    │
│строительство (кем, когда выдано,   │                                    │
│реквизиты документа)                │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Прогнозное/проектное топливо        │[вид, тип топлива, заключение       │
│(основное и резервное)              │договоров на поставку топлива]      │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Прогнозный объем потребления топлива│                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Топливообеспечение                  │[наличие подтверждения возможности  │
│                                    │поставки необходимых объемов        │
│                                    │топлива, стадия согласования с      │
│                                    │поставщиком/транспортировщиком      │
│                                    │топлива, наличие каких-либо проблем │
│                                    │с топливообеспечением объекта,      │
│                                    │наличие согласования топливного     │
│                                    │режима с указанием даты, начиная с  │
│                                    │которой подтверждено обеспечение    │
│                                    │топливом]                           │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Технологическое присоединение       │                                    │
│объекта к электрической сети:       │                                    │
│- заключение договора на            │                                    │
│технологическое присоединение (с    │                                    │
│указанием даты технологического     │                                    │
│присоединения к электрическим сетям)│                                    │
│- разработка схемы выдачи мощности  │                                    │
│- получение технических условий на  │                                    │
│технологическое присоединение       │                                    │
│- договор на реализацию СВМ и график│                                    │
│реализации СВМ                      │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Сметная стоимость проекта в ценах   │                                    │
│____ года с НДС, млн. руб.          │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Документ, в соответствии с которым  │                                    │
│определена стоимость проекта        │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Стоимость по результатам проведенных│                                    │
│закупок с НДС, млн. руб.            │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Объем заключенных на отчетную дату  │                                    │
│договоров по проекту, млн. руб.     │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│в том числе                         │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- по договорам подряда (в разбивке  │                                    │
│по каждому подрядчику и по          │                                    │
│договорам):                         │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│объем заключенного договора в ценах │                                    │
│____ года с НДС, млн. руб.          │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│% от сметной стоимости проекта      │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│оплачено по договору, млн. руб.     │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│освоено по договору, млн. руб.      │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- по договорам поставки основного   │                                    │
│оборудования (в разбивке по         │                                    │
│каждому поставщику и по договорам): │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│объем заключенного договора в ценах │                                    │
│____ года с НДС, млн. руб.          │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│% от сметной стоимости проекта      │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│оплачено по договору, млн. руб.     │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│освоено по договору, млн. руб.      │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- по прочим договорам (в разбивке по│                                    │
│каждому контрагенту и по договорам) │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│объем заключенного договора в ценах │                                    │
│____ года с НДС, млн. руб.          │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│% от сметной стоимости проекта      │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│оплачено по договору, млн. руб.     │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│освоено по договору, млн. руб.      │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│% законтрактованности объекта       │                                    │
│непосредственно с изготовителями    │                                    │
│и поставщиками                      │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│в том числе                         │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- СМР, %                            │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- поставка основного оборудования, %│                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- разработка проектной документации │                                    │
│и рабочей документации, %           │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│% оплаты по объекту (предоплата)    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│всего оплачено по объекту           │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│% освоения по объекту за отчетный   │                                    │
│период                              │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│всего освоено по объекту            │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Участники реализации инвестиционного│[юридическое лицо, вид услуг/       │
│проекта:                            │подряда, предмет договора, дата     │
│- заказчик-застройщик               │заключения/расторжения и номер      │
│- проектно-изыскательские           │договора/соглашений к договору]     │
│организации                         │                                    │
│- технические агенты                │                                    │
│- подрядчики                        │                                    │
│- поставщики основного оборудования │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Перечень субподрядных организаций,  │                                    │
│участвующих в строительстве объекта │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Количество строительно-монтажного   │                                    │
│персонала на площадке строительства │                                    │
│энергообъекта                       │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│в том числе                         │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- строительный персонал             │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- монтажный персонал                │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Основное оборудование               │[наименование, количество, краткие  │
│                                    │технические характеристики, сроки   │
│                                    │изготовления/поставки, место        │
│                                    │хранения]                           │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│График поставки основного           │                                    │
│оборудования                        │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│- дата поставки                     │                                    │
│- задержки в поставке               ├────────────────────────────────────┤
│- причины задержек                  │                                    │
│                                    ├────────────────────────────────────┤
│                                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│  Фактическое состояние реализации  │[возможность реализации в           │
│   инвестиционного проекта в срок   │установленный срок, отставание от   │
│                                    │установленного срока, причины       │
│                                    │отставания, возможный срок ввода    │
│                                    │объекта]                            │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Факты и события, влияющие на ход    │[описание факта или события, ссылки │
│реализации проекта, проблемные      │на документы, влияние факта/события │
│вопросы:                            │на срок реализации проекта в        │
│- выявленные нарушения договоров    │месяцах, принятые меры по           │
│подряда,                            │устранению причин отставаний и      │
│- рекламации к заводам -            │выявленных нарушений, исключающие   │
│изготовителям и поставщикам,        │их повторение]                      │
│- предписания надзорных органов,    │                                    │
│- дефицит источников финансирования │                                    │
│и др.,                              │                                    │
│- другое (расшифровать)             │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Руководитель организации
                                    (подпись)               (Ф.И.О.)
                                                  Печать

--------------------------------
<1> Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
<2> Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

Приложение N 11.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
           об исполнении сетевых графиков строительства проектов

                      (представляется ежеквартально)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                      "__" ______ 20__ года
                                                                       М.П.

Отчетный период _____________

по состоянию на ___________ 20__ г.

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация граф в таблице дана  в  соответствии  с  официальным  текстом
документа.

N пункта 
укрупнен-
ного     
сетевого 
графика  	Наименование   
этапов основных 
работ (с учетом 
подготовительного
периода до начала
строительства) по
общему сетевому 
графику <1>   	Сроки выполнения задач  
по укрупненному      	Процент 
исполнения
работ  
за весь 
период  
(%)   	Процент  
выполнения
за отчетный
период  
(%)    	Причины 
невыпол-
нения   	Предложения по
корректирующим
мероприятиям 
по устранению
отставания  	
		план   	факт    					
		начало	окон-
чание	начало	окон-
чание					
1    	2        	3  	4  	5  	6  	8    	9     	10   	11      	
I.    										
II.   										

										

--------------------------------
<1> Заполняется согласно приложению 3.2.

Приложение N 11.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

I. Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта для генерирующих
компаний (представляется ежеквартально)

N   
п/п  	Наименование                     	Тип    	
1.  	Предпроектный этап                                                	
1.1. 	Выбор площадки строительства                          	событие  	
1.2. 	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке 
строительства                                         	работа   	
2.  	Проектный этап                                                    	
2.1. 	Заключение договора на разработку ТЭО                 	событие  	
2.2. 	Заключение договора на разработку рабочего проекта    	работа   	
2.3. 	Разработка и утверждение ТЭО                          	событие  	
2.4. 	Разработка рабочего проекта                           	работа   	
2.5. 	Получение положительного заключения государственной   
экспертизы на ТЭО                                     	событие  	
2.6. 	Получение разрешения на строительство                 	событие  	
3.  	Организационный этап                                              	
3.1. 	Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС,   
ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками          	событие  	
3.2. 	Получение правоустанавливающих документов на          
земельный участок под строительство                   	событие  	
3.3. 	Заключение договоров на поставку основного            
оборудования                                          	событие  	
3.3.1.	График поставки основного оборудования на объект      	событие  	
4.  	Строительные работы                                               	
4.1. 	Подготовка площадки строительства                     	работа   	
4.2. 	Строительство основных сооружений (главного корпуса,  
гидротехнических сооружений, объектов топливного      
хозяйства, технического водоснабжения и др.)          	работа   	
4.3. 	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования     	событие  	
4.4. 	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для  
монтажа основного оборудования                        	событие  	
4.5. 	Монтаж основного оборудования и трубопроводов         	работа   	
4.6. 	Монтаж электротехнического оборудования и КиП         	работа   	
5.  	Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)       	
5.1. 	Заявка в сетевую компанию на технологическое          
присоединение                                         	событие  	
5.2. 	Заключение договора с сетевой компанией на ТП.        
Получение и согласование ТУ и ТП                      	событие  	
5.3. 	Разработка и согласование предпроектной внестадийной  
работы "Схема выдачи мощности"                        	работа   	
5.4. 	Заключение договора на реалиацию схемы выдачи         
мощности с согласованием графика строительства        	событие  	
5.5. 	Разработка рабочей документации сетевого              
строительства ГК (если таковое требуется для          
реализации СВМ)                                       	работа   	
5.6. 	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое    
требуется для реализации СВМ)                         	работа   	
6.  	Испытания и ввод в эксплуатацию                                   	
6.1. 	Индивидуальные испытания оборудования и               
функциональные испытания отдельных систем             	работа   	
6.2. 	Комплексное опробование оборудования                  	работа   	
6.3. 	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для                
технологического присоединения к электрическим сетям  	событие  	
6.4. 	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на  
ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта         
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию          
законченного строительством объекта)                  	событие  	

II. Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

N   
п/п  	Наименование                     	Тип    	
1.  	Предпроектный и проектный этап                                    	
1.1. 	Получение заявки на ТП                                	событие  	
1.2. 	Разработка и выдача ТУ на ТП                          	событие  	
1.3. 	Заключение договора на разработку проектной           
документации                                          	событие  	
1.4. 	Получение положительного заключения государственной   
экспертизы на проектную документацию                  	событие  	
1.5. 	Утверждение проектной документации                    	событие  	
1.6. 	Разработка рабочей документации                       	работа   	
2.  	Организационный этап                                              	
2.1. 	Заключение договора подряда (допсоглашения к          
договору)                                             	событие  	
2.2. 	Получение правоустанавливающих документов для         
выделения земельного участка под строительство        	событие  	
2.3. 	Получение разрешительной документации для реализации  
СВМ                                                   	событие  	
3.  	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы    	
3.1. 	Подготовка площадки строительства для подстанций,     
трассы - для ЛЭП                                      	работа   	
3.2. 	Поставка основного оборудования                       	событие  	
3.3. 	Монтаж основного оборудования                         	работа   	
3.4. 	Пусконаладочные работы                                	работа   	
3.5. 	Завершение строительства                              	событие  	
4.  	Испытания и ввод в эксплуатацию                                   	
4.1. 	Комплексное опробование оборудования                  	работа   	
4.2. 	Оформление (подписание) актов об осуществлении        
технологического присоединения к электрическим сетям  	событие  	
4.3. 	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию   	событие  	
4.4. 	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства    	событие  	

Приложение N 12
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Форма
              представления показателей финансовой отчетности

                      (представляется ежеквартально)

                 Финансовые показатели за отчетный период
                      [__ квартал ____ года/____ год]

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                     "__" _______ 20__ года
                                                                       М.П.

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┐
│       Наименование показателя       │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│             Метод учета             │ На конец отчетного │   На конец   │
│                                     │квартала/За отчетный│  2009 года/  │
│                                     │      квартал       │ За 2009 год  │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│                  1                  │         2          │      3       │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Выручка                              │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Чистая прибыль                       │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Направления распределения чистой     │                    │              │
│прибыли:                             │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│  дивиденды                          │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│  другое (расшифровать)              │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│EBITDA                               │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Дебиторская задолженность, в т.ч.:   │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│  покупатели и заказчики             │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│  авансы выданные                    │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Собственный капитал                  │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│<1> Заемный капитал (долгосрочные    │                    │              │
│обязательства), в т.ч.:              │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│  кредиты                            │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│  облигационные займы                │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│  займы организаций                  │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│  прочее                             │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Краткосрочные обязательства, в т.ч.: │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│  кредиты и займы <1>                │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│  кредиторская задолженность, в т.ч.:│                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│    по строительству                 │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│    по ремонтам                      │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│    по поставкам топлива             │                    │              │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Сумма процентов, выплаченых по       │                    │              │
│кредитам и займам                    │                    │              │
├─────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤
│              Оценка обеспеченности инвестиционных программ              │
├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Всего потребность в финансировании   │                                   │
│инвестиционной программы             │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Профинансировано на отчетную дату    │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Обеспеченность источниками           │                                   │
│финансирования                       │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Дефицит финансирования               │                                   │
├─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│                      Оценка кредитного потенциала                       │
├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Собственная оценка кредитного        │                                   │
│потенциала:                          │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│  на 2010 г.                         │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│  на период 2010 - 2012 гг.          │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Пояснения по расчету кредитного      │                                   │
│потенциала                           │                                   │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

--------------------------------
<1> По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Приложение N 13
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __

                                   Отчет
                      о техническом состоянии объекта

                      (представляется ежеквартально)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                     "__" _______ 20__ года
                                                                       М.П.

N 
п/п	Наименование 
направления/ 
проекта    
инвестиционной
программы   	Технические характеристики	Сроки      
реализации    
проекта     	Наличие исходно-разрешительной     
документации              	
		мощность,
МВт, МВА 	выработка,
млн. кВт/ч	длина
ВЛ, 
км  	год     
начала  
строи-  
тельства	год     
ввода в 
эксплуа-
тацию   	утверж-  
денная   
проектно-
сметная  
докумен- 
тация    
(+; -)   	заключение
Главгос-  
экспертизы
России    
(+; -)    	оформленный
в соответ- 
ствии с за-
конодатель-
свом земле-
отвод      
(+; -)     	разре-  
шение на
строи-  
тельство
(+; -)  	

											

Приложение N 14
к Приказу Минэнерго России
от "__" ____ 2010 г. N ___

              График реализации инвестиционной программы <1>,
                             млн. рублей с НДС

               (представляется ежегодно до 15 декабря года,
                        предшествующего плановому)

                                                                  Утверждаю
                                                   руководитель организации

                                                                  (подпись)
                                                                  ---------
                                                    "__" ________ 20__ года
                                                                       М.П.

                                 Перечень
             инвестиционных проектов инвестиционной программы
                         и план их финансирования

N N	Наименование    
объекта       	Остаток  
стоимости 
на начало 
года   
<1>    	Объем финансирования     
[отчетный год]        	Осталось    
профинан-   
сировать по 
результатам 
отчетного   
периода <1> 	
			всего,
год N 	I кв.	II  
кв. 	III 
кв. 	IV  
кв. 		
			план 
<2>  	план 	план 	план 	план 		
	ВСЕГО,              								
1. 	Техническое         
перевооружение и    
реконструкция       								
1.1.	Энергосбережение и  
повышение           
энергетической      
эффективности       								
1  	Объект 1            								
2  	Объект 2            								
... 									
1.2.	Создание систем     
противоаварийной и  
режимной автоматики 								
1  	Объект 1            								
2  	Объект 2            								
... 									
1.3.	Создание систем     
телемеханики и связи								
1  	Объект 1            								
2  	Объект 2            								
... 									
1.4.	Установка устройств 
регулирования       
напряжения и        
компенсации         
реактивной          
мощности            								
1  	Объект 1            								
2  	Объект 2            								
... 									
2. 	Новое строительство 								
2.1.	Энергосбережение и  
повышение           
энергетической      
эффективности       								
1  	Объект 1            								
2  	Объект 2            								
... 									
2.2.	Прочее новое        
строительство       								
1  	Объект 1            								
	в том числе ПТП     								
2  	Объект 2            								
	в том числе ПТП     								
... 									
Справочно:     								
	Оплата процентов за 
привлеченные        
кредитные ресурсы   								
1  	Объект 1            								
2  	Объект 2            								
... 								

    --------------------------------
    <1> В ценах отчетного года.
    <2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.

                         Источники финансирования
              инвестиционной программы на год N, млн. рублей

N N   	Источник      
финансирования   	Объем финансирования      	Причины 
отклонений	
		всего 	I кв.	II  
кв. 	III 
кв. 	IV  
кв. 		
		план 
<1>  	план 	план 	план 	план 		
1.   	Собственные        
средства           							
1.1.   	Прибыль,           
направляемая на    
инвестиции:        							
1.1.1.  	в том числе        
инвестиционная     
составляющая в     
тарифе             							
1.1.2.  	в том числе прибыль
со свободного      
сектора            							
1.1.3.  	в том числе от     
технологического   
присоединения (для 
электросетевых     
компаний)          							
1.1.3.1. 	в том числе от     
технологического   
присоединения      
генерации          							
1.1.3.2. 	в том числе от     
технологического   
присоединения      
потребителей       							
1.2.   	Амортизация        							
1.3.   	Возврат НДС        							
1.4.   	Прочие собственные 
средства           							
1.4.1.  	в т.ч. Средства от 
доп. эмиссии акций 							
2.    	Привлеченные       
средства, в т.ч.:  							
2.1.   	Кредиты            							
2.2.   	Облигационные займы							
2.3.   	Займы организаций  							
2.4.   	Бюджетное          
финансирование     							
2.5.   	Средства внешних   
инвесторов         							
2.6.   	Прочие привлеченные
средства           							

    --------------------------------
    <1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

                                   План
                      ввода/вывода объектов в году N

N 
п/п	Наименование
проекта   	Ввод мощностей       	Вывод мощностей      	
		план <1>         	план <1>          	
		МВт, Гкал/час, км, МВА   	МВт, Гкал/час, км, МВА   	
		I кв.

года 
N  	II  
кв. 
года 
N  	III 
кв. 
года 
N  	IV  
кв. 
года 
N  	год
N 	I кв.

года 
N  	II  
кв. 
года 
N  	III 
кв. 
года 
N  	IV  
кв. 
года 
N  	год
N 	
1 	2      	3  	4  	5  	6  	7 	8  	9  	10  	11  	12	

--------------------------------
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.